문서번호	백제학연구소-81
결재일자	2018.1.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		백제학연구소장		★한성백제박물관장
정치영		조영훈		01/26 이인숙
협 조
	총무과장				오천석
	교육홍보과장				권순철
	유물과학과장				이경자
	전시기획과장				김영심
	주무관				박중균

2018년 서울 석촌동고분군 발굴조사 계획

2018. 1.

한성백제박물관

백제학연구소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2018년 석촌동 고분군 발굴조사 계획

한성백제 왕릉지구 중장기 발굴조사 계획에 따라 서울 석촌동 고분군(사적 제243호) 1호분 북쪽구역에서 확인된 고분에 대한 정밀발굴조사를 통해 적석총의 정확한 구조와 성격을 규명하고 백제 왕도의 경관 복원 및 세계문화유산 등재를 위한 기초자료를 확보하고자 함

Ⅰ		사업 개요

❍ 사 업 명 : 2018년 석촌동 고분군 발굴조사

❍ 사업기간 : 2018. 1. ∼ 2018. 12.(실조사일수 120일)

❍ 조사지역 : 서울시 송파구 가락로7길 21(석촌동 248)

❍ 조사면적 : 3,650㎡

❍ 사업내용

- 석촌동 고분군 내 조사지역 발굴조사(유구조사·실측·사진기록 등)

- 발굴 유물·유구의 성격·편년·보존대책 등에 대한 자문회의 개최

- 발굴자료 정리·분석 및 발굴조사보고서 간행 준비

- 백제 한성기 왕릉지구 및 주요 고분 분포조사

❍ 소요예산 : 625,150천원

Ⅱ		추진 근거

❍ 한성백제박물관 발굴조사기관 등록 (2013. 6. 3.)

❍  백제학연구소 설치계획

(서울특별시장방침, 한성백제박물관총무과 – 제7321호, 2013. 6. 21.)

❍ 서울 석촌동 고분군 발굴조사 계획 (백제학연구소 – 820호, 2015. 9. 2.)

❍ 2016년 석촌동 고분군 발굴조사 계획 (백제학연구소 – 26호, 2016. 1. 14.)

❍ 2017년 석촌동 고분군 발굴조사 계획 (백제학연구소 – 72호, 2017. 1. 24.)

❍ 2017년 석촌동 고분군 발굴조사 학술자문회의 결과보고

(백제학연구소 – 2455호, 2017. 12. 13.)

❍ 2018년 백제왕도유적 발굴조사 계획 (백제학연구소 – 29호, 2018. 1. 12.)

❍ 한성백제 왕릉지구 (석촌동고분군) 중장기 발굴조사 계획

(백제학연구소 – 34호, 2018. 1. 15.)

Ⅲ		추진 경과

❍  2015년 석촌동 고분군 발굴(시굴)조사

- 석촌동 고분군 내 발굴(시굴)조사 협조요청(송파구 문화체육과-9958, 2015.5.4)

- 석촌동 고분군 발굴(시굴)조사 계획 수립(2015.5.14.)

- 시굴조사 시행(2015.5.26.~6.10.)

❍ 2015년 발굴조사

- 석촌동 고분군 발굴조사 계획 수립(2015.9.2.)

- 현상변경 허가 : 면적 400㎡, 기간: 2015.12.30. (실조사일수 40일)

- 발굴조사 허가(발굴제도과-11050, 2015.9.23.)

- 정밀발굴조사 시행(2015.10.28.~12.11.)

- 학술자문회의 개최(2015. 11. 27.)

❍ 2016년 발굴조사

- 석촌동 고분군 발굴조사 계획 수립(2016.1.14.)

- 현상변경 변경허가(1차)(보존정책과-398, 2016.1.21.) : 기간연장(~2016.4.30.)

- 현상변경 변경허가(2차)(보존정책과-1049, 2016.2.22.)

: 기간연장(~2016.12.31., 면적 변경(3,650㎡)

- 발굴조사 변경허가(1차)(발굴제도과-2897, 2016.3.9.)

: 실조사일수 120일 연장(40일→160일), 면적 3,100㎡)

- 조사 범위 내 시굴조사 및 정밀발굴조사 착수(2016.3.21.)

- 2016년 석촌동고분군 발굴조사 연장 계획 수립(2016.8.10.)

- 발굴조사 변경허가(2차)(발굴제도과-11040, 2016.9.2.)·착수(10.4.)

: 실조사일수 40일 연장 (160일→200일)

- 수목처리 현상변경 허가(보존정책과-6345, 2016.9.12.)·시행(9.25.)

- 학술자문회의 개최 (1차 : 6.15-16, 2차 : 11.30. )

- 동절기 조사 중지 (12.21. - 2017. 4. 백제학연구소-2256·2281)

- 현상변경 변경허가 신청	: 기간연장(2017.12.31.)

❍ 2017년 발굴조사

- 현상변경 변경허가(3차)(2017.1.9.) : 기간연장(2017.12.31.)

- 석촌동 고분군 발굴조사 계획 수립(2017.1.24.)

- 발굴조사 변경허가(2차)(발굴제도과-3828, 2017.3.29.)

: 실조사일수 150일 연장 (200일→350일)

- 현상변경 및 발굴조사 착수 (2017.4.5.)

- 제3차 학술자문회의 개최

	〈 학술자문회의 결과 〉
▪학술자문위원: 최병현(숭실대학교), 임영진(전남대학교), 최성락(목포대학교), 박순발(충남대학교), 권오영(서울대학교) 등 5인 ▪성격: 석촌동 1호분 및 외방내원분의 북측에 위치하며 적석총이 연접, 순차적으로 수평확장하여 거대 묘역을 형성한 양상의 고분임. ▪향후 발굴조사 방향 - 현행 조사로 과거 조사의 미해결점이 상당부분 해명되었지만 아직 전모를 알 수 없는 상황이므로, 특히 남쪽의 1호분 인접지역 등 발굴범위 외곽으로 이어지는 유구에 대해서는 확장조사를 진행해야 할 필요가 있음.

- 동절기 발굴조사 중지 (12. 18. 총350일 중 329일. 잔여 21일)

- 현상변경 변경신청 : 기간연장(~2018.12.31.)

Ⅳ		세부 추진계획

□ 추진방향

❍ 조사 대상 범위 내 하층 중복유구 및 남쪽 구간 정밀발굴조사 완료

❍ 1호분 인접구역 조사범위 추가 편입 및 발굴조사 실시 (면적 변경: 3,100㎡ → 3,650㎡)

❍ 발굴현장 시민 공개 동선 확보 및 관람시설 설치

❍ 조사 방안, 유구 및 유물의 성격, 편년, 보존대책 등에 관한 발굴조사 전·중·후 학술자문회의 개최

❍ 발굴유적 현황 측량, 정밀 촬영, 전자도면 및 영상 기록물 제작

❍ 발굴 유적·유물에 대한 각종 분석 및 보존처리 실시

❍ 백제 왕릉지구 내 매장문화재 분포 및 주요 고분 현황 조사를 위한 지중물리탐사(GPR), 입회조사, 지표조사, 탐색조사 실시

❍ 중장기 발굴조사계획 1단계-1차 범위(2015년~2018년 조사) 조사 완료

❍ 발굴조사 보고서 2년 이내(~2020년) 발간

❍ 조사 진행 및 보존관련 제반사항은 문화재청 등 유관기관과 협의 처리

□ 조사단 구성

- 조사단장: 이인숙(한성백제박물관장)

- 자문위원: 관련 전문가 5~7명 내외

- 조사위원: 조영훈(한성백제박물관 백제학연구소장)

권순철(한성백제박물관 교육홍보과장)

이경자(한성백제박물관 유물과학과장)

김영심(한성백제박물관 전시기획과장)

- 책임조사원 : 정치영(한성백제박물관 학예연구사)

- 조  사  원 : 최진석(한성백제박물관 학예연구사)

윤정현(한성백제박물관 학예연구사)

- 준조사원: 이홍주(한성백제박물관 연구원)

최재도(한성백제박물관 연구원)

박지영(한성백제박물관 연구원)

강다혜(한성백제박물관 연구원)

- 보  조  원 : 김호진(한성백제박물관 연구원)

신화영(한성백제박물관 연구원)

□ 추진일정

❍ 2018. 1. ~3.  : 유관기관 협의, 발굴조사 계획 수립, 발굴 신청 및 허가,

용역(인부·굴삭기) 공고 및 계약, 발굴 소요물품 구입

❍ 2018. 3.       : 조사 착수 전 1차 학술자문회의 개최

❍ 2018. 4. ~7.  : 발굴조사 착수·진행, 2차 학술자문회의 개최

❍ 2018. 8. ~10.	: 현장조사 진행, 현황 측량, 전자도면 및 영상물 제작

❍ 2018. 11.      : 3차 학술자문회의 및 현장설명회개최, 조사 완료, 복구

❍ 2018. 11. ~12. : 발굴조사 완료 신고서 및 약보고서 제출(문화재청),

발굴조사 자료(유물·도면·사진 등) 정리

□ 현장관리계획

❍ 현장조사는 학예연구사의 진행으로 평일 08시부터 17시 내 실시

❍ 혹서․혹한기, 미세먼지․황사 발생일 등 안전사고 위험 시 조사 중지 등 탄력적 운영

❍ 일일 조례·종례 및 주간 정례회의 실시하여 조사 현황 및 진도 관리

❍ 작업인부 및 굴삭기 기사의 수기 사인으로 출근 점검 및 주간 안전교육 실시

❍ 학예연구사 외 현장관리 책임 체계 설정으로 현장 안전 및 인력관리

❍ 작업현황, 인력·장비운용 내용 명시한 발굴조사 일지 작성 및 주간업무보고

❍ 현장공개시 조사 요원의 안내·통제 하에 유구 보호 및 안전사고 예방 조치

Ⅴ		소요 예산

❍ 예산금액 : 625,150천원

❍ 예산과목 : 선사·고대 역사문화 공간 창조, 소장유물 확보 및 보존, 백제왕도유적 발굴조사, 기간제근로자등보수(100-101-04)/사무관리비(100-201-01)/공공운영비(100-201-02)

❍ 예산내역

구분	내용	소요예산 (천원)	예산과목	집행방법
발굴조사 인력 운영	-발굴조사 진행 업무보조 -유물정리·발굴보고서 간행 업무보조	287,000	기간제근로자등 보수	기간제근로자등 보수 지급
발굴조사	-제토인력 및 장비 임차 -조사재료비 -유물·유구 실측비 -측량·항공촬영비 -과학분석비 -학술자문위원회 진행 -발굴보고서 간행 등 -발굴유적 교육·활용·홍보 등	334,650	사무관리비	용역입찰 / 수의계약 / 일상경비 교부 후 지출 / 일반지출
공공요금 및 차량유류비 지급	-발굴현장 전기·전화 등 공공요금 지급 -조사차량·난방 유류비 지급 등	3,500	공공운영비	일상경비 교부 후 지출
계		625,150

Ⅵ		행정 사항

❍ 출토유물 보존처리 및 임시보관유물 수장고 격납(유물과학과)

❍ 발굴 성과 홍보 및 현장 탐방, 체험학습 등 지원(교육홍보과)

❍ 발굴 속보전 등 전시 지원(전시기획과)

❍ 발굴 관련 용역 계약 진행, 발굴차량 출입 지원, 발굴조사 범위 내 수목 이식 등 지장물처리 지원, 관람시설 설치 지원(총무과). 끝.

□ 도면자료

2018년 발굴조사 범위

2016-2017

발굴조사 허가 범위

도면 1. 2018년 석촌동고분군 발굴조사구역 위치도

도면 2. 2018년 석촌동고분군 발굴조사구역 표시도

도면 3. 2018년 석촌동고분군 발굴조사 현장 운용 계획도

확장조사 구간

보호수

탐색조사 및 확장조사 구간

관람동선

현장사무실