문서번호	조경과-1291
결재일자	2018.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	조경시설팀장	조경과장		푸른도시국장
조현	석승우	문길동		01/29 최윤종
협 조
	생태공원과장		최병언

2018 한강변 녹지경관 개선 추진계획

2018. 1.

푸른도시국

(조 경 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	공공조경가 자문 및 자문위원단 구성
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	■	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□	안전시설 설치 등 계획수립
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	서울시설공단
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

2018년 한강변 녹지경관 개선 추진계획

한강변 자동차전용도로변의 삭막한 사면부 및 폐도로 등에 수목을 식재하는 등 “비움과 채움”을 통해 한강의 확 트인 수변경관과 건강한 녹색경관을 조성하고자 “한강변 녹지경관 개선사업”을 아래와 같이 추진하고자 함.

근거 : 행정2부시장 지시사항(‘16.1.14.) 및 방침 제186호

Ⅰ				추 진 방 향

도로변 옹벽 등 인공구조물에 상록수 식재 등 녹화 개선

시계접속부 녹음 가로수 등 식재로 녹량감 증대

폐도로 부지에 다층구조 녹지조성으로 풍성한 숲경관 조성

Ⅱ				추 진 경 위

‘16. 1.14. : 행정2부시장 지시사항 수명(조경과)

‘16. 4. 7. : 행정2부시장 보고(조경과, 용역수행 지시)

‘16. 6.30. : 용역 추진계획 수립(도로시설과)

‘16.11. ~ ’17.12. : 용역준공

		※ 용역개요
	○ 용 역 명 : 한강변 도시고속도로 녹지· 도로시설물 경관개선 기본 및 실시설계 ○ 용 역 비 : 264백만원 ○ 용 역 사 : ㈜경호엔지니어링종합건축사사무소 조영수, ㈜바우컨설탄트 심만석 ○ 용역기간 : ‘16.11.22.~’17.12.12. ○ 용역결과 - “비움”과 채움을 통한 수변 및 녹지경관 개선사업 추진 · 방호울타리 등 시설물 분야 : 안전총괄본부(도로시설과) · 방음벽녹화 등 녹지 분야 : 푸른도시국(조경과) - 일관되고 체계적인 통합관리 · 시야저해목 및 가로수 정비 등 : 서울시설공단(조경관리처) · 방음벽 등 시설물 청소 및 보수 등 : 서울시설공단(도로관리처)

Ⅲ				2018년 사업계획

사업기간 : 2018. 1. ~ 12.

대 상 지 : 올림픽대로변 3개소

규    모 : 6,700㎡

사 업 비 : 800백만원(시설비 790, 시설부대비 10)

사업내용 : 사면 및 시계접속부 등 수목식재를 통한 경관숲 조성

세부 사업개요

대 상 지	성수~영동대교	개화IC	동작대교 남단	비 고
사업내용	사면녹화 (덩굴식물 및 식생매트 설치 등)	수목식재 (소나무 등 15종 319주 등)	폐도로 철거 및 수목식재 (청단풍 등 11종 1,346주)
규 모	3,050㎡	3,000㎡	650㎡
대상지 현황

사업주체 : 한강사업본부

중점 추진사항

- 도로 기준 제외지(한강측)/제내지(주택가측) 조성계획 수립

▷ 제외지(한강측) : 한강조망, 통경축 확보 통한 수변경관 조성

▷ 제내지(주택가측) : 다층구조 패턴의 녹지축으로 녹색경관 조성

- 겨울철 경관을 고려 상록수 일정비율 식재

- 수목활착과 조기경관을 고려 주 교목은 R15 이상 수목 도입

- 사면녹화시 저관리형 매트 등을 활용 사계절 고유경관 조성

- 원활한 생육활착을 위한 환토 등 기반조성 철저

- 녹지를 부각시키는 컬러 톤다운 반영(기와진회색 등)

Ⅳ				향후 추진일정

2018.  1월         : 사업계획 수립 및 시달

2018.  2월 ~  3월 : 계약심사 및 공사발주

2018.  4월 ~ 12월 : 공사시행 및 인계

Ⅴ				행 정 사 항

계약심사 및 공사발주 : 한강사업본부(생태공원과)

공사시행             : 한강사업본부(생태공원과)

공사감독             : 서울시설공단

공사 착·준공보고     : 서울시(조경과) 및 한강사업본부(생태공원과)

인수인계             : 한강사업본부(생태공원과) 및 서울시설공단

붙 임 : 용역보고서 일건(별첨).  끝.