문서번호	조경과-512
결재일자	2018.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	조경과장	관리부장		서울대공원장
장숙희	강인호	심상원		01/29 송천헌
협 조
	주무관		최수영

2018년 서울대공원 등산로 정비사업 추진계획

2018. 1

서울대공원 조경과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2018년 서울대공원 등산로 정비사업 추진계획

서울대공원 산림욕장길을 중심으로 치유숲, 청계산 등 주변 숲길에 대한 연결 단절구간 노면 정비, 목책, 휴게시설 등을 설치하여 산림훼손 최소화 및 시민들의 이용 편의를 도모하고자 함

추진근거

❍ 2018년 근교산 등산로 정비사업 추진계획 수립 통보 (2018.1.24.)

❍ 서울대공원 숲 비전 수립(2015.12.10.)

사업개요

❍ 대  상  지 : 산림욕장길, 치유숲 진입숲길

❍ 규      모 : 6km

❍ 사업내용 : 데크로드 정비, 흙막이 설치, 휴게시설 및 야자매트 설치, 노후 시설 교체 등

❍ 사업기간 : 2018. 2월 ~ 6월

❍ 사 업 비 : 275백만원 (자체예산 125백만원, 시비 재배정 150백만원)

추진방법

❍ 실시설계용역 : 수의계약(소액)

- 설계용역비 : 15백만원

- 참 가 자 격 : 산림분야기술사무소 또는 산림전문분야 엔지니어링업체

❍ 공사발주 : 공개경쟁입찰(산림사업)

- 공 사 비 : 260백만원

- 참가자격 : 산림사업법인, 산림조합중앙회, 산림조합

❍ 관련근거 : 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제27조

소요예산

❍ 사 업 비 : 275백만원

- 공사비(260백만원), 설계용역비(15백만원)

❍ 예산확보 : 자체 예산 및 시비 재배정

- 자체 예산 : 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 산림내 이용시설 정비 및 관리 : 125백만원

- 시 재배정 : 생태계복원 및 보전과 야생동식물 보호, 생태계보전, 생태계보전사업, 근교산등산로정비, 시설비 : 150백만원

향후 추진일정

❍ 기술용역타당성 심사 의뢰 .............................2월

❍ 설계용역	.................................................2월 ~ 3월

❍ 공사발주 및 시행........................................ 4월 ~ 6월

붙 임:위치도 및 현황사진 1부. 끝

위  치  도

2018 근교산 등산로 정비공사 대상지

현 황 사 진

등산로 정비 대상	흙막이 설치 대상