문서번호	도시철도토목부-1188
결재일자	2018.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		토목1과장		도시철도토목부장
김용선		윤방식		01/29 이도헌
협 조
	건축공사과장				이병희
	시설전기과장				이덕한
	설비계획과장				이명수
	주무관				임경태

『지하철9호선 3단계 920공구 건설공사』

발주계획 검토 보고(10차)

2018. 01

도시기반시설본부

[도시철도토목부]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

『지하철9호선 3단계 920공구 건설공사』

발주계획 검토 보고(10차)

『지하철9호선 3단계 920공구 건설공사』와 관련 ‘18년 예산 편성에 따른 10차 발주계획에 대해 검토 보고 드림. ※ 벽산엔지니어링㈜ 벽산(E)189FGC24-00003호(‘18.01.22)

1		공사 개요

○ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사

○ 공사구간 : 석촌역 ~ 올림픽공원 남4문

○ 공사규모 : 총연장 1,390.5m(터널934.5m, 정거장1개소, 환기구4개소)

○ 공 사 비 : 금159,474백만원

○ 공사개요 : ‘09.12.30 ~ ‘18.12.31

○ 시 공 사 : 롯데건설㈜외 1개사

○ 감 리 사 : 벽산엔지니어링(주)

2		발주 계획(10차)

○ 공사기간 : 착공일로부터 2018.12.31.일까지

○ 발주금액 : 금13,637,224천원

(단위 : 천원)

구 분	총 괄	기발주(준공) (1~9차)	금회 발주 (10차)	장래	비고
계약 금액	159,474,424	145,837,200	13,637,224	-
공사 기간	‘09.12.30 ~ ‘18.12.31	‘09.12.30 ~ ‘17.12.31	착공일 ~ ‘18.12.31	-

○ 10차 분야별 발주 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	토 목	건 축	기 계(소 방)	전 기
전 체	159,474	133,316	6,388	14,070	5,700
(비 율)	100%	83.60%	4.01%	8.82%	3.57%
10차	13,637	6,532	2,341	3,747	1,017
(비 율)	100%	47.90%	17.17%	27.48%	7.46%

○ 10차공사 공종별 공사비 발주현황

(단위 : 천원)

구 분	총공사비	발주금액			비 고
		기발주(1~9차)	금 회(10차)	잔여분
1. 토 목
1.1 본선개착	11,385,098	10,651,083	734,015
1.2 본선터널	30,395,134	30,395,134
1.3 934 정거장	20,738,716	19,330,624	1,408,092
1.4 본선환기구	16,252,290	15,428,453	823,837
1.5 기타	2,657,925	2,422,810	235,115
소 계	81,429,163	78,228,104	3,201,059
2. 건축	4,254,517	2,680,713	1,573,804
3. 전기(정거장)	3,803,828	3,207,743	596,085
4. 기계설비	10,227,705	7,535,590	2,692,115
직접공사비 계	99,715,213	91,652,150	8,063,063
간접공사비	29,058,649	26,349,243	2,709,406
계	128,773,862	118,001,393	10,772,469
설계비 외	14,681,131	14,120,260	560,871
물가변동(1,2,3회)	14,647,835	13,066,545	1,581,290
광역상수도 이설공사	1,371,596	649,002	722,594
총 공사금액	159,474,424	145,837,200	13,637,224

○ 분야별 공종 및 물량

- 토 목

구 분	공 종	단위	총물량	발주물량			잔량	비 고
				기발주 (1~9차)	금차(10차)	소 계
본선 개착	되메우기	㎥	58,278	43,026	15,252	58,278
	포 장	a	30		30	30		표층
	지장물 복구		1,955	615	1,340	1,955
934 정거장	되메우기	㎥	46,694	26,683	20,011	46,694
	구 조 물	㎥	28,269	26,874	1,395	28,269
	포 장	a	65		65	65		표층
	지장물 복구	m	2,796	1,137	1,659	2,796
본선 환기구	되메우기	㎥	43,539	30,644	12,895	43,539
	구 조 물	㎥	18,830	18,410	420	18,830
	포 장	a	50		50	50		표층
	지장물 복구	m	1,794	485	1,309	1,794
광역상수관	관로 이설공사	m	542	444	98	542		수자원

- 건 축

구 분	공 종	단위	총물량	발주물량			잔량	비고
				기발주 (1~9차)	금차(10차)	소 계
조적공사	블럭쌓기	㎡	5,738	5,683	55	5,738
석 공 사	화강석붙임	㎡	5253	2,750	2,503	5,253
	화강석통석	㎡	794		794	794
금속공사	금속벽체판넬	㎡	4,344	3,500	844	4,344
	유리난간대	m	290	160	130	290
	금속천정판넬	㎡	4,895	3,682	1,213	4,895
타일공사	타일붙이기	㎡	1,157	165	992	1,157
엘리베이터공사	내부E/V	EA	1		1	1
	외부E/V	EA	4		4	4
안내사인공사		식	1		1	1
미술장식품설치		식	1		1	1

- 기 계

구 분	공 종	단위	총물량	발주물량			잔량	비고
				기발주 (1~9차)	금차(10차)	소 계
장비설치공사	장비설치공사	대	72	54.8	17.2	72
공조설비공사	공조배관공사	m	904	226	678	904
	공조덕트공사	m	13,727	13,207	520	13,727
	위생배관공사	m	2,364	834	1530	2,364
자동제어공사	자동제어공사	m	4,628	4,628	0	4,628
승강설비공사	승강설비공사	EA	11	3.7	7.3	11
소방설비공사	펌프실배관 공사	m	111	111		111
	스프링클러 배관공사	m	6,408	6,241	167	6,408
스크린도어 설치공사	스크린도어	식	1	0.75	0.25	1
자전거주차장 설비공사	자전거주차장	EA	1		1	1
본선 환기설비공사	환기설비공사	EA	16	13.6	2.4	16

- 전 기

구 분	공 종	단위	총물량	발주물량			잔량	비고
				기발주 (1~9차)	금차(10차)	소 계
전기실공사	수배전반	면	30	25.2	4.8	30
	전력배선	m	1,849	1,849		1,849
접지공사	접지공사	식	1	1		1
전력간선공사	전력간선배관	m	8,571	8,278	293	8,571
	전력간선배선	m	41,004	40,148	856	41,004
	분전반,MCC	면	59	59		59
동력공사	동력배관	m	3,238	3,238		3,238
	동력배선	m	16,589	16,589		16,589
전등·전열공사	전등·전열배관	m	16,328	15,826	502	16,328		외부출
	전등·전열배선	m	66,823	64,675	2,148	66,823		외부출
	조명기구	EA	1,901	1,232	669	1,901
소방공사	소방배관	m	9,457	8,957	500	9,457
	소방배선	m	37,218	33,923	3,295	37,218

3		공사관련자 현황

구 분	소 속	직 명	성 명	비 고
설 계 자	벽산엔지니어링(주)	책임감리원	이상희
심 사 자	벽산엔지니어링(주)	기술지원감리원	최성규
확 인 자	벽산엔지니어링(주)	대표이사	김동운
지원업무 수행자	도시기반시설본부	도철토목부 공사관리관	김용선	토목
		도철건축부 공사관리관	김영준	건축
		도철설비부 공사관리관	박명기	기계
		도철설비부 공사관리관	박지영	전기

4		책임감리원 검토의견

○ 10차 공사 발주내역을 검토한 결과 발주구간의 작업은 토목분야(출입구 및 환기덕트, 되메우기, 도로포장 등), 건축분야(석공사, 판넬설치공사 등), 기계분야(공조설비 및 승강장설비공사), 전기분야(전력간선 및 전등·전열조명공사 등)를 시행하여 준공에 차질이 없도록 진행코자 함.

5		조치 계획

○ 책임감리용역사인 벽산엔지니어링(주)에서 요청한 바와 같이 10차분 공사를 발주코자 함.

구분	계약기간	계약금액	비 고
10차	착공일로부터 ~‘18.12.31	13,637,224천원

붙 임 : 1. 감리단 공문 및 검토 의견서 1부.

2. 설계내역서(10차) 1부.  끝.