투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재(단가계약) 납품기한 연장 의뢰[도시고속도로 연결램프(정릉길)설치공사]

1. 설비부-13603(2017.10.19.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인 ‘도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치공사’와 관련, 관급자재 대하여 납품기한 연장을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 납품기한 연장 내용

계약번호	계약업체	계약금액(원)	납품기한		비고
			당 초	변 경
***********	*******	***********	2017.11.15.	2017.12.20.	□ 계약금액 변경없음 □ 납기 35일 연장

나. 납품기한 연장사유 : 선행공정(토목) 지연에 따른 후속인 설비분야 관급자재                           납품기한 연장 필요

다. 납품기한 연장 귀책소재 : 본부

라. 지체상금 부과 여부   : 미부과

따로 붙임  1. 방침서 1부.

2. 납기연장 관련문서(합의각서 포함) 1부.

	설비부장
주무관	박경철		시책사업과장	임현근		설비부장	10/19 권오식
협조자
시행	설비부-17573	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8647	/전송	3708-8659	/	pkc6896@seoul.go.kr	/	부분공개(5)