문서번호	건축기획과-23194
결재일자	2017.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색건축팀장	건축기획과장
윤별		박제혁	10/23 박경서
협 조

『공공건축물의 에너지 진단 및 개선방안 제시』용역

과업기간 연장 계약변경 계획

2017. 10

주택건축국

(건축기획과)

『공공건축물의 에너지 진단 및 개선방안 제시』 용역

과업기간 연장 계약변경 계획

용역 중간보고시 전문가 자문을 받은 결과 경제성 분석 등에서 추가 보완 사항이 발생하여 과업의 완성도를 높이기 위해 과업기간을 연장코자 함

1		용역개요

□ 용역명 : 공공건축물의 에너지 진단 및 개선방안 제시

□ 계약현황

계약금액	준공일	계약자	기타
47,664천원	2017.10.30.	(사)한국환경건축연구원

2		추진경위

○ 2017.06.02. : 용역계약 및 착수

○ 2017.07.06. : 착수 및 에너지 진단 계획 보고

○ 2017.08.30. : 중간보고(1차)

○ 2017.10.19. : 중간보고(2차)

3		계약변경 내용

□ 변경내용(기간연장)

구 분	계약금액	준공일	계약자	기타
변경 전	47,664천원	2017.10.30.	(사)한국환경건축연구원	과업내용 변경 없음
변경 후	변경없음	2017.12.14.	변경없음

□ 변경사유

○ 자문의견으로 개선방안의 경제성 분석에서 시장가격 반영 요구

○ 구체적 개선공사 방안 산출 요청

○ 시뮬레이션을 활용한 개선안 분석이 필요한 사항으로 추가 시간 소요

※ 계약 상대자 귀책사유 없음

□ 연장기간 검토

○ 추가 시뮬레이션 분석 및 견적 취합(1개월 15일)

□ 검토결과

○ 과업의 목적달성을 위해 과업기간을 연장하고자 함

4		향후계획

○ ‘17. 10~11월 : 경제성 추가 분석 시뮬레이션 실시

○ ‘17. 11월 말 : 결과보고

○ ‘17. 12월 중 : 용역준공 . 끝.

붙임.  용역기간 연장 요청서(사유서 포함) 1부. 끝.