문서번호	현장민원과-2178
결재일자	2018.1.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	현장민원과장		남부수도사업소장
박상현	박학중	이연섭		01/31 전영석
협 조
	행정관리팀장		신민철
	주무관		심숭금

2018년 노후 옥내급수관 교체 추진계획

2018. 1.

남부수도사업소

(현장민원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 노후 옥내급수관 교체 추진계획

고도정수처리한 맑고 깨끗한 아리수를 시민들이 체감할 수 있도록 노후

옥내급수관 교체를 적극 추진하여 음용환경을 획기적으로 개선코자 함.

☞ 관련문서 : 급수설비과 - 758(2018.1.24)호 「’18년 노후 옥내급수관 교체 추진계획」

Ⅰ		추 진 방 향

노후 옥내급수관 교체 적극 추진으로 음용환경 개선

아파트 노후 공용급수관 교체공사시 전담관리원 의무화(조례 개정 추진)

- 수도조례 제40조(급수설비의 관리책임 등) 제5항 규정 신설

다가구주택 차등지원 세분화 확대로 교체 활성화 유도(조례 개정 추진)

- 현행 2 ~ 19가구(최대250만원) ⇒ 2 ~ 7가구, 8 ~ 13가구, 14 ~ 19가구(최대300만원)

노후 옥내급수관 교체 홍보 강화

공동주택 노후 공용급수관 교체 비리 근절

Ⅱ		사 업 개 요

노후 옥내급수관 현황(’17년 12월말 기준)

교체대상 : 58,178가구(12년 전수조사)

사업기간 : ’07. 7월 ~ 계속사업

노후 옥내급수관 현황

구 분	교 체 대 상
	계	교체완료	미교체
계	58,178	32,422	25,756
세대급수관	23,740	7,599	16,141
공용급수관	34,438	24,823	9,615

연차별 추진계획

구 분	계	추진실적	향 후 계 획
			소계	’18년	’19년	’20년	’21년이후
가 구 수	58,178	32,422	25,756	4,500	4,500	4,500	12,256
사업비(억원)	252	126	126	22	22	22	60

Ⅲ		’17년 추진실적

2017년 지원 및 분기별 실적

’17년 사업목표				지 원 실 적				추진율 (%)
목표 가구수			예산액 (백만원)	지원 가구수			예산액 (백만원)
계	세대급수관	공용급수관		계	세대급수관	공용급수관
5,000	1,700	3,300	2,432	5,296	1,409	3,887	2,383	106

구 분	계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
목 표	5,000	500	2,000	3,500	5,000
실 적	5,296	1,170	1,852	3,575	5,296
증 · 감	+ 296	+ 670	- 148	+ 75	+ 296
추 진 율	106%	234 %	93 %	102 %	106 %

2017년 APT 공용급수관 지원 현황

2017년 APT 공용급수관 지원 대상 : 9개 단지 / 3,690세대 / 1,476백만원 지원

연번	구	위 치	아 파 트 명	세대수	지 원 완 료 일
1	영등포	도림로 100	신길우성5차	321	- 7월 27일 지원 완료
2		대림로31길 40	신동아대림	591	- 12월 19일 지원 완료
3		여의대방로5길 6	우 창	214	- 5월 30일 지원 완료
4	금 천	시흥대로51길 55	성 지	233	- 3월 22일 지원 완료

연번	구	위 치	아파트명	세대수	지 원 완 료 일
5	동 작	여의대방로44길 47	대방주공	798	- 9월 20일 지원 완료
6		여의대방로22아길 22	신동아	171	- 9월 6일 지원 완료
7	관 악	신림로 48길 17-20	신림건영4차	236	- 12월 15일 지원 완료
8		신원로 26	신림동부	496	- 11월 31일 지원 완료
9		호암로 417	국제산장	630	- 2월 13일 지원 완료

노후 옥내급수관 교체 전·후 설문조사 시행 실적

대   상 : 2017년 노후 옥내급수관 교체 가구

기   간 : ’17년. 1. ~ 11.

조사방법 : 아리수 품질확인제 조사원을 활용한 설문조사

설문대상 : 785가구

설문결과 : 440가구(응답률56%) / 거부 : 345가구

구 분	직접음용	보리차 등 끊인 수돗물	정수기	생수	지하수,약수 등	비고
교체 전	1.3%	28.2%	46.7%	21.9%	1.9%
교체 후	12.8%	41.2%	35.3%	10.3%	0.4%
향후 음용 여부	28.0%	41.7%	26.7%	3.6%

Ⅳ		’18년 추진목표

사업목표 : 4,500가구(사업비 2,200백만원)

구 분	’18년 사업목표 및 예산				배정액(백만원)		비 고
	교 체 가 구			예산액 (백만원)	상반기 (70%)	하반기 (30%)
	계	세대급수관	공용급수관
남 부	4,500	1,600	2,900	2,200	1,540	660

분기별 추진계획

구 분	목 표 (가구)	예산액 (백만원)	1/4분기 (10%)		2/4분기 (30%)		3/4분기 (30%)		4/4분기 (30%)
			가구	예산	가구	예산	가구	예산	가구	예산
남 부	4,500	2,200	450	220	1,350	660	1,350	660	1,350	660

월별 추진계획

목 표	1/4분기(10%)				2/4분기(30%)				3/4분기(30%)				4/4분기(30%)
	소계	1월	2월	3월	소계	4월	5월	6월	소계	7월	8월	9월	소계	10월	11월	12월
5,000	450	150	150	150	1,350	450	450	450	1,350	450	450	450	1,350	450	450	450

Ⅴ		세 부 추 진 계 획

공 용 급 수 관

공동주택 노후 공용급수관 교체 중점 추진(공용급수관 2,900가구)

- 녹물이 나오는 ’94년 이전 건축한 공동주택의 노후 옥내 공용급수관을 중점 교체(갱생)하여 고도정수처리시설이 완료된 깨끗한 아리수를 음용할 수 있는 급수환경을 조성

- 노후 공용급수관 교체 권고 공문 및 지원안내문 발송

- 현재 장기수선충담금이 적립되어 교체 계획중인 공동주택에 대한 독려 강화

노후 공동주택 공용급수관 교체독려 및 교체 공사비 지원안내 강화

- 추진시기 : ’18년 연중 실시

- 대상단지 : 5개 단지 3,314세대(신길우성2차아파트 등)

- 독려방법 : 공동주택 입주자대표 회의, 부녀회장 및 관리사무소장 등을 직접               방문하여 자발적 노후 공용급수관 교체 유도(홍보부스 설치·운영)

- 독려대상 : 2018년 공용급수관 교체공사 계획중인 공동주택( 5개소 / 3,314세대 )

연번	구	위 치	아파트 명	세 대 수	진 행 사 항
1	영 등 포	대방천로 180	신길우성2차	725	- 지원 신청 준비중
2	관 악	보라매로 62	보라매삼성	710	- 지원 신청 준비중
3		신길로3길 40	신림건영3차	783	- 지원 신청 준비중(입찰공고 준비)
4		보라매로3길 29	보라매해태	256	- 지원 신청 준비중
5	금 천	한내로 69-54	독산주공14	840	- 승인(´17.11.02.) 완료/공사 진행중

아파트 공용급수관 교체 공사비 과다설계 감독 철저

- 공사 설계단계부터 외부전문가 자문 및 전문설계사 참여

- 기계설계분야 전문감리원이 현장 직접 관리 및 시공연장 실측

- 공사가 완료된 배관 연장에 대하여 전문감리원과 합동으로 현장 실측 후 준공

세 대 급 수 관

자발적으로 지원 신청 가능토록 다양한 홍보기획을 강화(세대급수관 1,600가구)

- 자치구 소식지, 지역 유선방송, 지역신문에 공문 시행 및 지원안내문 제공

- 구청, 동주민센터 민원실에 노후 옥내급수관 공사비 지원안내문 비치

- 통 · 반장 회의 시 사업취지 설명, 지원안내문 부착 및 배포

- 아리수품질관리제 가정 방문 시 수질검사 및 노후 옥내급수관 지원 병행홍보

- 사업소 직원 방문 시(옥내 누수탐지, 급수불편, 계량기 교체 등) 노후 옥내급수관  지원 안내 등 홍보 병행

- 공사를 시행하는 관내 설비업체에 제도의 취지와 지원방법 등을 안내함으로써          홍보 효과를 극대화

- 노후 옥내급수관 개별가구 우편 발송 및 마을버스 광고게시판 홍보

공사비지원 홍보안내문 및 플래카드 제작

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 영업비용

- 예산코드 : 42201(사무관리비)

- 예산배정액 : 5,000천원

- 제작매수 : 10,000매(안내문). 4개(플래카드)

Ⅵ		행 정 사 항

’18년 노후 옥내급수관 추진계획 ⇒ 본부보고(’18.2.1)

노후 옥내급수관 교체 활성화를 위한 조례, 업무처리지침 개정 계획에 따라 다가구주택의 지원금 차등 지원 ⇒ 본부추진중

아리수품질확인제 요원을 활용한 지원안내홍보 협조요청 ⇒ 행정지원과

매월 옥내급수관 교체실적 및 수질 설문조사표, 홍보실적 등 ⇒ 본부 보고

9월말 까지 멸실 및 예정가구 등 교체대상 변동사항 ⇒ 본부 보고

붙  임 1. 2018년 사업소별 사업목표 및 지원예산 1부

2. 2018년 사업소별, 월별, 분기별 교체 추진계획 1부

3. 월별 교체 실적보고 양식 1부

4. 설문조사 및 수질검사보고 양식 1부

5. 옥내급수관 지원안내문 1부.  끝.