문서번호	조경과-567
결재일자	2018.1.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
★주무관	주무관		조경과장		관리부장		서울대공원장
강명희	김효준		강인호		심상원		전결 01/31 송천헌
협 조
	전략기획실장					유연호
	총무과장					이행용
	운영과장					윤대진
	시설과장					오임석

테마가든 재조성사업 추진계획

2018. 1.

(조경과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

테마가든 재조성사업 추진계획

조성된 지 18년이 지난 테마가든의 낡은 공간을 아름답고 특색있는 생태공원으로 재조성하고자 함.

Ⅰ		대상지 현황

▢ 조성기간 : 1999. 3. ~ 2000. 4.

▢ 개 원 일 : 2000. 9. 1(유료화 : 2003. 5. 1)

▢ 면    적 : 84,147㎡(테마가든 : 54,075㎡, 어린이동물원 : 28,072㎡)

▢ 시설현황 : 장미원, 모란‧작약원, 휴(休)정원, 고향정원, 호숫가 등

구 분	테마 내용	공간 구성
장미원	세계 각국의 다양한 절화, 정원 장미를 테마로한 장미 주제 정원
모란·작약원	장미처럼 화려하고 풍성한 꽃이 있는 모란, 작약 주제 정원
휴(休)정원	드넓은 잔디밭과 허브온실, 휴게시설이 갖추어진 휴식이 있는 정원
고향정원	지자체와 MOU를 맺어 심은 사과, 매실 등이 있는 유실수 정원
어린이동물원	어린이들이 좋아하는 동물을 주제로한 어린이 눈높이 동물원

▢ 입장객 현황

년도 구분	2017년	2016년	2015년	비고
입장객수	319,974명	329,959명	291,097명
입장수입	478,000천원	579,000천원	253,000천원

※ 2017년은 조류독감으로 인한 테마가든 폐장(1~3월)으로 입장객 수 감소

Ⅱ		추 진 배 경

▢ 장미원 위주로 관람동선이 조성되어 다른 주제정원의 이용률이 낮음

○ 잠재된 매력공간의 개발 및 연결 부족으로 공간 활용도가 떨어짐

○ 노쇠한 장미, 볼거리·즐길 거리의 부족에 따른 관람객의 욕구 충족 미흡

▢ 조성된 지 18년이 경과한 낡은 시설로 관람객 유인 매력이 떨어짐

Ⅲ		추 진 계 획

▢ 기    간 : 2018년 ~ 2020년(3개년)

▢ 대 상 지 : 테마가든 일대(54,075㎡)

▢ 추진방향

○ 서울대공원 식물원에서 테마가든을 잇는 공립수목원의 공간 재정립

○ 호숫가 등 테마가든만의 경관요소를 활용한 아름다운 생태공원 조성

▢ 추진내용

○ 공간의 특화를 위한 주제 및 방향 설정, 관람 동선 재구성

○ 노후시설물 제거 및 교체(바닥포장, 조명등 등), 장미 품종 개량 등

▢ 세부추진계획

○ 기본계획용역 시행

- 추진방법 : 수의계약(지방계약법 시행령 제25조 1항 5호, 여성기업)

- 용 역 비 : 55,000천원

- 대    상 : 조경기술사사무소 또는 조경분야엔지니어링 업체

※ 용역비 산출근거 : 국토개발 표준품셈 적용(면적기준)

○ 실시설계 용역 시행

- 추진방법 : 일반경쟁입찰(지방계약법 시행령 제13조)

- 용 역 비 : 기본계획용역 결과에 따라 설계용역비용 산정

- 대    상 : 조경기술사사무소 또는 조경분야엔지니어링 업체

○ 공사 시행

- 방    법 : 2018년부터 연차별 시행

- 소요예산

▸ 2018년(1차)           : 가용예산 범위 내(250,000천원)

▸ 2019~2020년(2~3차) : 기본계획용역 결과에 따라 예산 확보 후 산정

※ 예산과목 : 다양한축제 및 볼거리프로그램 운영, 장미원유지관리, 시설비및부대시설비, 시설비

Ⅳ		추 진 일 정

▢ 2018. 2월               : 기술용역 타당성 심사

▢ 2018. 2. ~ 6월         : 기본계획용역(120일)

▢ 2018. 7. ~ 9월         : 실시설계용역(90일)

▢ 2018. 10. ~ 12월       : 1차 공사 시행

▢ 2019. 1. ~ 2020. 12월 : 2·3차 공사 시행

Ⅴ		행 정 사 항

▢ 기본계획 용역 결과에 따라 사업 순위별 단계적 예산확보 추진

▢ 사업 시행 시 운영과, 시설과 등 관련부서 담당자 실무회의 실시

붙 임 : 위치도 및 대상지 현황 사진 1부.  끝.