문서번호	정수시설과-895
결재일자	2018.1.31.
공개여부	부분공개(2 5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
나필수		남효돈	01/31 가길현
협 조
	주무관			김희수

1취수장 정류기반 외 1종 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.01

암사아리수정수센터

(정수시설과)

1취수장 정류기반 외 1종 교체 계획

우리 정수센터 1취수장 전기실에 설치된 내용연수(10,11년)가 경과한정류기반 및 MCC반을 아래와 같이 교체하여 안정적인 전력공급 및 아리수 생산공급에 철저를 기하고자 함.

□ 1취수장 정류기반 및 MCC반 현황

연 번	시설물명	위 치	규 모	기 능	설치년도	비고
1	정류기반	1취수장 전기실	1면	수전반·기동반 조작전원 공급	2004년
2	MCC반		1면	각종 전기기기 전원공급	2001년

≪정류기반 및 MCC반≫

□ 보고자 의견

❍ 1취수장 전기실 정류기반 및 MCC반은 내용연수(11,10년)가 이미 경과한        시설물로써 노후로 인해 잦은 고장이 발생하고 있으며 특히, MCC반        부품손상이 심하여 빠른시일내 교체하여 아리수 생산공급을 위한 전력        공급의 안정화를 유지코자 함.

□ 사업추진 개요 및 방법

❍ 사 업 명 : 1취수장 정류기반외 1종 구매 설치

❍ 사 업 비 : 150,000천원

❍ 사업내역 : 1취수장 정류기반 1면, MCC반 1면

❍ 사업기간 : 2018. 3. ~ 11. 30

❍ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비

[1취수장 정류기반외 1종 교체]

❍ 추진방법 :  상기와 같은 추진사항에 대하여 조달청 제3자 단가계약 (우수조달물품)에

의해 추진코자 하며, 계약심사 제외대상임.

□ 사업추진 일정

❍ 2018. 1.    : 사업발주 검토

❍ 2018. 2.    : 조달청 계약 의뢰.

❍ 2018. 3. ~ 11. 30 : 사업완료.

붙임 : 산출서(설계서) 1부.  끝.