문서번호	급수운영과-2749
결재일자	2018.1.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
이훈재	권기섭	송근호		01/31 이구석
협 조
	시설관리과장		최명익
	시설관리팀장		박종일
	주무관		이상환
	주무관		노운학

2018년 무단수 급수체계 구축사업 추진계획

2018. 1.

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

’18년 무단수 급수체계 구축사업 추진계획

2018년부터 본부(배수과) 연차별 사업 계획에 따라 누수 등 돌발사고에 대비 주요관로 이중화, 블록시스템 구축 등을 통한 단수없는 안정적인 급수 공급체계 구축 사업의 추진 계획을 보고 드림.

Ⅰ. 추진개요

□ 관련근거

○ ’15.05.11 : 2030 서울특별시 수도정비기본계획 승인(환경부)

- 상수관망 최적화, 무단수 공급체계 구축, 지능형 상수관망 체계 도입

○ ’17.05.18 : 무단수 급수체계 구축 사업 추진 계획(본부장 방침)

○ ’17.12.28 : ’18년 무단수 급수체계 구축 사업 추진계획(본부 배수과)

□ 추진목적

○ 상수도관망 블록시스템 구축과 주요관로 복선화를 통한 비상연결 네트워크 구축으로 누수발생 및 돌발사고 등 비상시에도 365일 중단 없는 안정적 급수 공급을 위함.

□ 추진방향

○ 상수도관망 최적화(블록 시스템 구축) ○ 주요 송배수관로 복선화 ○ 정수장, 지역배수지간 비상 연결관로 구축 ○ 주요밸브 원격감시 제어시스템 구축	▶	안전하고 맛있는 수돗물의 안정적 공급 서울 시민의 물 복지 실현

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 무단수 급수체계 구축 사업 (본부)

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2030년(13년간)

○ 규    모 : 중블록 정비 145개 블록, 관망정비 130.8km, 복선화 및 비상관로 연결(By-pass) 39km, 전동밸브 144개소

○ 총사업비 : 2,664억원

계	1단계						2단계	3단계
	소계	’18	’19	’20	’21	’22	’23~’27	’28~’30
2,664	915	110	130	150	225	300	1,365	384

○ 중블록 재구축 계획

사업소	현 재	장 래	증감여부
동부	12	16	4

※ 아차산3중블록, 용마중블록: 중블록 규모 과다 및 유지관리를 위해 세분화, 병합

Ⅱ. 2018년 사업계획

□ 2018년 추진계획

○ 정비목표 : 중블록 유량계 2개소 및 경계밸브 설치

○ 사 업 비 : 320백만원

○ 사업기간 : ’18. 3 ~ ’18. 12.

○ 사업개요

블록명	추진사업	사업비 (백만원)	사업계획
계		320	유량계 2개소 및 경계밸브 설치
대현산11	중블록 고립	120	유량계(900㎜) 1개소
월곡1	중블록 고립	200	유량계(500㎜) 1개소, 경계밸브 등

□ 세부추진 내용

1. 대현산 11중블록 유량계(D=900mm) 설치

○ 공사위치 : 성동구 용답동 179(고산자교 청계천변)

○ 공사개요 : 유량계 D=900mm*1개소 설치(기전설비)

- ’17년 고산자교 송배수관 정비공사 유량계실(900mm) 설치 완료

○ 사 업 비 : 120백만원

○ 공사기간 : ’18. 3. ~ ’18. 8.(6개월)

2. 월곡 1중블록 유량계(D=500mm) 및 경계밸브 설치

○ 공사위치 : 동대문구 이문동247-1(성북구 경계지점, 석관동332-218)

○ 공사개요 : 유량계, 경계밸브 D500mm 및 퇴수밸브D150mm 설치

○ 사 업 비 : 200백만원

- 상수도 시설물공사(토목) 120백만원, 유량계(기전설비) 80백만원

○ 공사기간 : ’18. 5. ~ ’18. 11.(7개월)

□ 추진방법

○ 사업 시행관련, 현장조사 및 물량 선정

- 무단수 급수체계 구축사업 타당성 조사용역 시설계획도면 참조

○ 사업대상의 적정성, 사업의 연계성 등 본부 심사

○ 유량계실 및 경계밸브 설치 등 설계, 발주, 공사 시행

□ 추진일정

○ 현장조사 및 설계 : 2018. 1월 ~ 2월

※ 교통계획서 작성 및 시공도면 검토 : 1월말

○ 계약심사 및 발주 : 2018. 2월 ~ 3월

○ 계약 및 착공 : 2018. 3월 ~ 4월

Ⅲ. 향후 계획

○ 2018. 1. 31.(수) 무단수 급수체계 구축사업 도면심사

- 사업소 추진계획 제출(본부 배수과)

○ 완료된 중블록에 대해서는 상수도 GIS시스템에 입력 관리

붙임 : ’18년 중블록별 무단수 급수체계 세부 계획 1부.  끝.