서울시 시정정보를 한눈에! “서울시 홈페이지(seoul.go.kr)”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방재난본부 대체식당 연장운영에 따른 조치계획 알림

1.「남산 예장자락 재생사업」과 관련입니다.

2. 우리시 중구 예장동 4-1번지 일대의 도시계획시설(도로) 개설로 인해 소방재난본부 대체식당을 ’18.1.31.까지 운영할 계획이었으나, 사업이 늦어져 ’18.5.31.까지 운영기간을 연장하게 되었습니다. 이에 따른 조치계획을 붙임과 같이 알려드리니, 대체식당이 2월 이후에도 원활하게 운영될 수 있도록 후속조치를 진행하여 주시기 바라며,

3. 아울러, 도시기반시설본부 각 부서는 금회 연장운영기간까지 소방재난본부 리모델링 사업이 마무리될 수 있도록 업무추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

□ 대체식당 운영계획

○ 위    치 : 중구 예장동 8-145(애니메이션센터 내)

○ 규    모 : 일반음식점 1개동, 203.4㎡

○ 운 영 자 : 소방재난본부 구내식당 위탁운영업체

○ 운영기간

- 당초 : ’17.10. 1.~ ’18. 1.31.

- 변경 : ’17.10. 1.~ ’18. 5.31.(4개월 연장)

□ 관련부서(기관) 협조 요청사항

○(도시기반시설본부) 사업지연 원인관련 설계자 의견에 대한 사실관계 확인

소방재난본부 리모델링사업 적기 추진

○(소방방재센터) 직원 및 위탁운영업체에 대체식당 운영계획 안내

필요시 위탁운영업체와 협의 및 계약변경

○(서울산업진흥원) 애니메이션센터식당 건물 무상사용

붙임 : 1. 소방재난본부 대체식당 연장운영에 따른 조치계획 1부.

2. 설계자 의견서 1부.

3. 소방재난본부 리모델링 예정공정표 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	소방행정과장,서울특별시도시기반시설본부장(건축부장),서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장),서울종합방재센터소장(자원관리과장),서울산업진흥원대표이사
주무관	배현경		특화공간조성팀장	유봉모		공공재생과장	01/31 홍선기
협조자
시행	공공재생과-1053	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	2133-8705	/전송	2133-0885	/	xodiddls@seoul.go.kr	/	부분공개(7)