문서번호	도로보수과-990
결재일자	2018.1.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
이종호		김권일	01/31 김용제
협 조

'17/'18년 제설대책 민간위탁용역 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 1

'17/'18년 제설대책 민간위탁용역 실정보고

‘17/’18년 겨울철 제설대책 추진과 관련 우리 사업소에서 민간위탁업체에 무상지원하는 차량이 폐차됨에 따라 이에 따른 제설대책 방안을 검토하여 보고 함

1		용역개요

○ 용 역 명 : ‘17/’18년 제설작업 민간위탁용역(장기계속)

○ 용역기간 : 2017.11.15.~2018.03.15.

○ 용 역 비 : 총차 300,251,600원

- 1차: 43,846,000원, 2차: 256,405,600원

○ 도 급 자 : 천우건축기계(주) 대표 우순애

2		작업노선

○ 작업노선 : 총41.74km

구분	노선	제설구간	도로현황		제설장비			비고
			폭(m)	연장(m)	차량	살포기	삽날
발진기지	행주대교	행주대교 본선, 남단IC	29~17	2,070	○	6㎥	-
	노들길	양화교~노들지하차도	20	4,600	○	11㎥	3.2m
	공항로	공항입구~양화교	40	7,400	○	11㎥	3.2m
		양화교~공항입구			○	11㎥	3.2m
	남부순환로	행주대교남단~화곡로입구	20~40	16,470	○	11㎥	3.2m
		화곡로입구~오류IC			○	11㎥	3.2m
		오류IC~시흥IC			○	11㎥	3.2m
	경인로	부천시계~구로역	35	9,400	○	11㎥	3.2m
		구로역~서울교			○	11㎥	3.2m
	여의대로	서울교~마포대교남단	74	1,800	○	11㎥	3.2m

3		현황 및 문제점

○ ‘17/’18년 민간위탁용역에 지원하는 제설차량 미 확보

- 당초 설계시 사업소 제설차량(2대)을 민간위탁용역에 무상 임대하는 것으로 설계하였으나,

-『2017년도 공용차량 대․폐차 계획』에 의거 내용연수 경과한 제설차량(8톤) 2대를 폐차 후 구매 할 계획이었으나, 사업소 제설작업 운영 등 업무량 감소 이유로 덤프트럭이 정수물품에서 감축 됨

※ 관련근거: 특정사업용 공용차량 정수 감축 회신(총무과-23804)

○ 조종원 감소에 따른 민간위탁용역 재설업무 증가 추세

- 제설차량 조종원 감소로 인하여 총 8명중 금년도에 전·후반 1명씩 퇴직 후 별도 인원 확보가 안되는 사항으로 직영 제설작업 구간 축소가 불가피한 실정임

※ 작업노선 : 올림픽대로 및 가양대교(2개조 4명 운영)

○ ‘17/’18년 제설대책 민간위탁용역 예산 부족

- ’18년 하반기 민간위탁용역을 위한 실질적인 소요예산(370백만원)을 요구하였으나, 전년도와 동일 금액(320백만원)으로 예산이 편성 됨

⇨ ‘18년 상반기 제설대책 이후 집행잔액 예상액 : 20백만원

□ 민간위탁용역 예산현황                            (단위: 백만원)

예산요구액			재배정금액			비고
계	‘18년상반기	‘18년하반기	계	‘18년상반기	‘18년하반기
500	370	130	320	210 (300)	110 (20)	(집행액)

※ 예산 미확보시 ‘18/’19년 제설용역 20백만원 발주 예정

4		조치계획

○ 효율적인 제설작업을 위하여 용역업체에서 차량 확보 후 반영 조치

- 용역 예산 부족으로 ‘17.12.31.까지 운전원(2명) 인건비만 반영하고, ’18.01.01.부터 제설 종료시까지 제설 차량 2대를 추가한 총 10대분에 대해서 월임대료 반영 조치

[소요예산 : 36,250천원]

․ 덤프트럭 월임대 7,250,000원 × 2대 × 2.5월 = 36,250,000원

※ 소요예산 증감내역                                   (단위: 천원)

구 분	당 초	변 경	증가액	비 고
총 차	300,252	336,502	36,250
1차분	43.846	43,846	-	‘17년 하반기
2차분	256,406	292,656	36,250	‘18년 상반기

- 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 재설대책추진, 시설비및부대비, 사무관리비

5		행정사항

○ 민간위탁업체에서 시행한 제설차량 월임대 비용은 2018년 재배정 예산으로 설계변경 후 반영 조치

○ ’18년 하반기 제설용역 부족분(180백만원)을 도로관리과에 예산 요청.  끝.