	서울특별시
수신	(주)시아플랜건축사사무소 대표 조주환
(경유)
제목	사실관계 확인을 위한 자료 제출요청

1. SIA-설계1본부-12(2018.1.26.)호와 관련입니다.

2. 우리시는 「소방재난본부 대체식당 연장운영에 따른 대책회의(2018. 1.22.)」시 소방재난본부 리모델링사업의 지연원인이 측량오류에 따른 설계도면 미제출에 있는 것으로 감리단이 보고함에 따라, 원인을 제공한 설계자가 대체식당 연장운영에 따른 소요비용을 부담하는 것에 대하여 귀 사에 검토요청드린 바 있습니다. 이에, 귀 사는 측량오류에 대한 사업지연 책임을 일부 인정하면서도 설계완료 후 공사진행에 따라 총 8개 항목의 변수가 발생했으며, 서울시와 식당운영관련 당사자와의 협약관계에 따른 추가 발생비용을 귀 사가 부담하는 것은 부당하다는 의견을 주셨습니다.

3.이에, 우리시는 귀 사 의견에 대해 신중하게 검토코자 하오니, 공사진행에 따른 변수로 지목하신 8가지 항목의 사실관계를 객관적으로 확인할 수 있는 증빙자료를 2018.2.7.(수)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

□ 사실관계 확인 필요 항목

① 인도교량의 교각 위치변경으로 구조재검토 및 설계변경

② 도로 및 건물의 측량오류로 공사지연(2개월)

③ 기존건물의 구조보강대책으로 잭서포트 추가설치

④ 식당 부출입구 변경

⑤ 스프링클러 동파로 인한 현장조사

⑥ 지하 PIT 층 발견에 따른 배수검토

⑦ 동절기 공사기간

⑧ 소방재난본부 리모델링공사기간 현장파견근무(3개월간)

4.아울러, 소방재난본부 대체식당의 운영기간이 금일 만료됨에 따라 우리시, 위탁운영업체, (재)서울산업진흥원은 손실보상비·제세공과금에 대하여 당초 조건과 동일하게 협약을 진행하기로 하였으니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임 : 설계사 의견 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	배현경		특화공간조성팀장	유봉모		공공재생과장	01/31 홍선기
협조자
시행	공공재생과-1027	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	2133-8705	/전송	2133-0885	/	xodiddls@seoul.go.kr	/	대시민공개