문서번호	조경과-1493
결재일자	2018.1.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	조경시설팀장	조경과장
김현이	석승우	전결 01/31 문길동

- 물을 이용한 친수공간 조성사업 -

대상지 변경 검토 보고(성동구)

2018. 1.

- 물을 이용한 친수공간 조성사업 -

대상지 변경 검토 보고(성동구)

「2018년 물을 이용한 친수공간 조성사업」추진과 관련, 성동구의 대상지

변경 등 사업계획 변경 승인 요청 건에 대하여 아래와 같이 검토·보고드림.

□ 추진경위

○ ’18. 1. 19. : ’18년도 사업 추진계획 수립

○ ’18. 1. 23. : 추진계획 시달(조경과 ￫ 성동구 등 6개 자치구)

○ ’18. 1. 25. : 대상지 변경 승인 요청(성동구 ￫ 조경과)

□ 2018 사업개요

○ 대 상 지 : 용산구 원효로4가 113-59 원효대교 북단 녹지대 등 7개소

○ 규    모 : 8,400㎡(신규조성 897㎡, 시설정비 7,503㎡)

○ 사업기간 : 2018. 1. ~ 9.

○ 사 업 비 : 1,965백만원(시설비 1,960, 시설부대비 5)

○ 사업내용 : 수경시설 설치 및 휴게공간 조성, 노후 시설 정비 등

□ 변경 요청사항 : 대상지 변경 승인 요청

○ 요청부서 : 성동구 공원녹지과

○ 변경내용 : 대상지 변경

구 분	대상지	면적(㎡)	사업비 (백만원)	사업내용	비고
당 초	동호로 교통섬	597	360	수경시설 설치 및 녹지대 정비 등
변 경	동호로 중앙분리대 녹지대	1,195	360	수경시설 설치 및 녹지대 정비 등

○ 변경사유 : 이설이 어려운 지장물 및 차량 이동방향 등으로 사업효과 미비

- 동호로 교통섬에는 이설이 어려운 지장물(고압전주, 환풍기 등) 및 대형수목이

있어 수경시설 설치 위치가 제한적임

- 당초 대상지에 수경시설 설치 시 지장물 및 차량 이동방향의 제한적 영향으로

시야확보가 안되어 사업효과 미비

- 동호로 중앙분리대 녹지대에 수경시설을 설치 시 지장물이 없고 차량이동

양방향에서 쉽게 볼 수 있어 사업효과 극대화

○ 위치도 및 현황사진

	⇒
당초		변경

□ 검토결과 : 변경 승인(적정)

○ 당초 대상지 현장 여건을 고려할 때 지장물(고압전주, 환풍기 등) 이설과

대형 수목 이식이 곤란하고 상수도 인입 등 급수원 확보가 어려울 것으로 판단되며,

○ 변경 대상지는 급수원 확보가 쉽고 지장물이 없으며 양방향에서 조망이 가능 하는 등 사업 효과와 공사 시기 및 예산의 효율적 집행 등을 감안 대상지 변경이 타당하다고 판단되어 대상지 변경 승인하고자 함.

□ 행정사항

○ 사업대상지 변경 승인 통보(시 → 성동구)

※ 성수대교 북단 교통섬 수경시설 조성 부지 또한 상수도 및 전기 인입이 어렵고

입지 여건상 수경시설 조성시 사업 효과가 미비할 것으로 판단됨에 따라 조속히

대상지를 변경 검토하여 우리 시 승인을 득하도록 통보

붙 임 : 사업대상지 변경 요청서(성동구) 1부.  끝.