문서번호	방재시설부-1308
결재일자	2018.2.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
김자환		代이원영	02/01 이임섭
협조

- 경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계) -

멀티휀스 방진막 추가설치 관련 실정보고 검토

2018. 1.

- 경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계) -

멀티휀스 방진막 추가설치 관련 실정보고 검토

「경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계)」공사현장 멀티휀스 방진막 추가설치 관련 실정보고 검토 보고임.

▶ 관련근거 : 선진경춘(감) 제18–018(2018.1.31.)호

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계)

○ 규    모 : 연장 2.9㎞, 면적 85,038㎡ (2차 연장 0.4㎞, 면적 17,500㎡)

○ 도 급 비 : 5,663백만원 (2차 1,883백만원)

○ 공사기간 : ’17.01.02 ~ ’18.06.30 (2차 ’17.11.01~’18.06.30)

Ⅱ

검토내용

방진망 추가 설치구간(L=501m)

당초 방진망 설치계획구간(L=377m)

멀티휀스 방진막 설치구간

○ 공사현장 주변에 주택지역 및 학교가 위치하고 있는 지역으로                미세먼지 비상저감조치의 일환으로 멀티휀스에 비산먼지망 추가 설치        반영

- 멀티휀스 방진막 추가 설치(L=501m)

멀티휀스(방진막 추가) 상세도

○ 수량 대비표

구 분	단위	수 량			비고
		당초	변경	증ㆍ감
부대공
멀티휀스	m	501	-	감 501
멀티휀스(수직안전망)	m	377	878	증 501

○ 개략공사비 증감대비표                               (단위 : 천원)

공 종	당초	변경	증․감	비고
직접공사비(부대공)	29,236	33,003	증 3,766
직접공사비 소계	29,236	33,003	증 3,766
제 경 비(부가세포함)	8,933	10,006	증 1,073
도 급 액(개략공사비)	38,170	43,010	증 4,840

○ 적용단가 검토

- 증·감된 공사량의 단가는 기존 도급단가 적용

Ⅲ

책임건설사업관리기술단 검토의견

○ 경춘선 폐선부지 공원조성 공사(3단계)(2차분)와 관련 상기와 같이 검토 한 결과,

- 최근 서울형 비상저감조치 3회 발령 및 비산먼지발생 억제를 위한 조치를 강화하고 있는 바, 당초 철길 산책로 구간에만 반영된 방진망(L=377.0m)을 현장 전 구간으로 확대하여 공사 현장내 비산먼지 발생을 억제할 수 있는 방진망을 추가(L=501.0m) 설치 반영함이 타당할 것으로 사료 됨.

- 상기의 내용을 향후 설계변경 시 반영함이 타당할 것으로 판단됨.

Ⅳ

보고자 의견

○ 최근 미세먼지로 인하여 대기질이 악화되고 있는 실정으로 공사현장 주변 여건이 주거지역임을 감안하여 방진막을 추가 설치하는 사항으로 상기 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어 우선 승인통보하여 현장 반영 조치하고, 건별 증감액이 5천만원 이하지만 주요 공정 변경 안건임을 고려 향후 설계변경 소위원회 심의를 거쳐 설계변경 시 그 결과를 반영토록 건설사업관리기술단에 통보하고자 함.

붙임  건설사업관리기술단 실정보고서 1부.  끝.