		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고 승인 알림(멀티휀스 방진망 추가 설치 관련-경춘선 3단계))

1.업무지시현장 : 경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계) 주식회사 선진엔지니어링종합건    축사사무소

2.작 성 일 자 : 2018-02-01 13:02:40

3.지 시 내 용:

가. 선진경춘감-18-018(2018.01.31.)호와 관련입니다.

나. 「경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계)」멀티휀스 방진막 추가설치 관련 실정보        고 건에 대하여 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어 원활한 공        사추진을 위해 우선 승인 통보하니 현장에 반영하여 조치하여 주시고, 주요 공정        변경사항임을 감안 향후 설계변경 시 우리 본부 설계변경 소위원회 심의 후 그 결        과를 반영하여 주시기 바랍니다. 끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							김자환			공원시설과장					代이원영					방재시설부장					02/02 이임섭
협조자
시행			방재시설부-1375									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부															/
전화		02-3708-8733						/전송			02-3708-8756					/	2015060246@seoul.go.kr												/	대시민공개