문서번호	도시철도설비부-1180
결재일자	2018.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	차량과장	도시철도설비부장
양인석	강치석	02/02 구자훈

9호선 3단계 시운전 결과 보고

2018.02.01

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

9호선 3단계 일일 시운전 보고

2018.02.01.(목)

□ 금일실적

급 전	단 전	시험시간
09 : 24	17: 02	09:40∼16:55

○ 시험내용

- 931, 934역 제어권 TDC 시험

○ 시운전참여인원 : 8명 (상황실 : 2명, 본부 : 명, 공사관계자 : 4명, 기관사 : 2명)

※ 급전후 차량 예열 및 점검시간 30분 필요

□ 본선 출입승인

구분	분 야 (공구)	회사명	작업구간	작업명	작업인원	비 고
1	전차선	현창전기	923공구	케이블배관	박홍호 외 2명	단전후~23:00
2	통신	일광기업	931~938 정거장	통신케이블 포설	봉희종 외 3명	단전후~24:00
3	신호	진우산전	전구간	현장정리 및 마무리 작업	윤중경 외 3명	단전후~22:00
4	통신	SKT 통신사	932~934 터널	이동통신 현장실사	박정훈 외 5명	단전후~ 익일 02:00
5	통신	LGU+ 통신사	931~933 터널	이동통신 현장실사	김상우 외 3명	단전후~ 익일 0６:00

□ 시운전차량

○ 편성번호 : 944편성

○ 주박위치 : 32K 400 지점

□ 기타 특이사항

○ 없음

□ 시험계획

○ `18.02.02 　931, 934역 제어권 TDC 시험(신호시험)   끝.