투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	9호선3단계 시스템분야 책임감리단장 귀하
(경유)
제목	9호선 3단계 송변전/전차선공사 변경계약 시행 알림

1. 서지9-3 시감 제18-32호(2018.1.29)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 9호선 연장건설 3단계 송변전/전차선 공사에 대한 변경계약 의뢰를 아래와 같이 시행하였음을 알려드리며, 변경계약 체결 절차 및 기성신청 등 업무추진에 만전을 기하시기 바랍니다.

3. 아울러, 공사추진에 있어서 안전사고 예방 및 개통일정에 맞추어 완벽한 시공이 되도록 책임감리업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

◉  아    래  ◉

공사명	구분	공사기간		비고
		당초	변경
1구간 송변전	총차	´15. 8.20 ~ ´18. 2. 4	´15. 8.20 ~ ´18.11.30
	2 차	´16.12. 1 ~ ´18. 2. 4	´16.12. 1 ~ ´18.11.30
2구간 송변전	총차	´15. 9. 2 ~ ´18. 2.17	´15. 9. 2 ~ ´18.11.30
	2 차	´16. 9. 1 ~ ´18. 2.17	´16. 9. 1 ~ ´18.11.30
1구간 전차선	총차	´15. 8.24 ~ ´18. 2. 8	´15. 8.24 ~ ´18.11.30
	3 차	´18. 1. 2 ~ ´18. 2. 8	´18. 1. 2 ~ ´18.11.30
2구간 전차선	총차	´15. 8.24 ~ ´18. 2. 8	´15. 8.24 ~ ´18.11.30
	3 차	´17.12.26 ~ ´18. 2. 8	´17.12.26 ~ ´18.11.30

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김병훈		송변전과장	서태창		도시철도설비부장	02/02 구자훈
협조자
시행	도시철도설비부-1175	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스 빌딩8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7123	/전송	02-772-7308	/	skbhoon@seoul.go.kr	/	대시민공개