문서번호	교량안전과-1842
결재일자	2018.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	교량기획팀장		교량안전과장		안전총괄관		안전총괄본부장
김시련	박동욱		한유석		배광환		02/02 고인석
협 조
	동부도로사업소장					송만규
	토목부장					代여용석
	광역도로과장					여용석
	주무관					김율희

구리암사대교 인수 인계 추진계획 보고

구리암사대교 인수·인계 추진계획 보고

2018.  02

안전총괄본부

(교량안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

구리암사대교 인수·인계 추진계획 보고

우리 시 도시기반시설본부에서 시행한 「구리암사대교 건설공사」와 관련하여 건설된 시설물(교량, 교량부속시설물 등)에 대한 인수·인계 추진 보고.

Ⅰ		추 진 개 요

□ 사업개요

- 위    치 : 강동구 암사동 ~ 구리시 아천동

- 규    모 : 폭 24～44m(4～6차로), 연장 2.74km

교량 1.13km,  연결도로 1.61km

- 아천 IC (7,417 m / 1,505 m) : ST : 748,    RC : 517,  IPC : 240,  토공 : 5,966

- 암사 IC (4,998 m / 1,766 m) : ST : 1,234,  RC : 502,  IPC : 30,   토공 : 3,232

- 공사기간 : '06. 4. ~ '16. 12.

- 시 공 사 : 현대건설(주)

- 감 리 사 : (주)도화엔지니어링 외 1개사

- 총사업비 : 432,159백만원 (국비 : 50%, 시비 : 50%)

□ 추진 사항

- ‘16.12.15 : 공사 준공

- ‘16.08~`18.01 : 구리암사대교 인수·인계를 위한 합동점검(3회) 및 관계자 회의 개최(3회)

- ‘18.01.22 : 구리암사대교 보수계획 및 시설물 인수·인계 요청(도기본→교량안전과)

※ 전문가 합동점검 결과 LMC포장 균열이 심화구간(북단RAMP-C)에 대하여는 우선 전면 재시공(1경간, 40m)하고, 잔여구간은 재시공 시 시공상태를 조사하여 추가보수 등 검토〔토목부-1282호(`18.1.22)〕

Ⅱ		인수시설 현황

□ 인계/인수 : 도시기반시설본부 토목부/안전총괄본부 교량안전과

□ 인수대상 시설물

○ 도로계획과 방침에 따라 관리 구간 분할(「구리암사대교 준공 후 유지관리방안」, ‘16.7.5.)

○ 우리시 구간

- 교량 본선 및 직결램프는 교량안전과에서 인수하여 관리

<우리시 구간의 구리암사대교 유지관리 기관(부서)>

- 교량 본선 및 직결램프 : 교량안전과

- 자동자전용도로(올림픽대로)와 연결램프 : 서울시설공단

- 교량 본선과 접속되는 토공부 도로 및 기전시설 : 동부도로사업소

- 제설관리 : 동부도로사업소

- 교통광장 내 녹지대 및 교량청소 : 강동구

- 강동구내 구도(도시계획도로) : 강동구

※ 본선과 직결되는 램프의 토공부 도로(램프교대↔자동차전용도로)는 평면상 물리적으로 도로가 구분되는 접속램프 옹벽을 기준으로 관리기관 분리

○ 구리시 구간

- 교량 본선(토공부 접속도로 포함) 및 직결램프(B,C)는 교량안전과에서 인수

<구리시 구간의 구리암사대교 유지관리 기관(부서)>

- 교량 본선(토공부 접속도로 포함) 및 직결램프(B,C) : 교량안전과

- 기타 접속램프, 교통광장 내 녹지대 및 교량 청소 : 서울시설공단

- 제설관리, 기전시설 : 동부도로사업소

※ 우리시 행정구역 밖의 시설물에 대해 일반적인 한강상 교량 유지관리 방안 적용이 곤란하여 국토부 재정결과 및 구리시 인가조건, 도로계획과 주관 회의를 통해 유지관리부서 결정

Ⅲ		점검지적사항 조치

□ 점검 지적사항 조치결과

지 적 건 수			비 고
총 계	조 치	미조치
60건	56건	4건

□ 미조치 사항 및 검토의견

○ 미조치 사유 및 향후계획

지적사항	미조치 사유 및 향후계획
- MP3 하류측 차량방호책, - MP4 상류측 차량방호책, - MP4 상류측 중앙분리대, - MP12 상류측 차량방호책 전이구간 연결 덮개 손상	교량 공용 중 교통사고로 인해 교량 부속 시설물이 파손된 것 (설계 또는 시공상의 문제 아님)으로 시설물 유지관리적 차원에서 보수 하고자 함

○ 검토 의견

- 인수인계 전 교량 점검 결과 시설물의 구조적 안전성에 영향을 미치는 결함사항은 발견되지 않음

- 케이블 정착구 누유에 대한 사항은 전 구간 케이블 정착구 조사하고 보호캡을 고정하는 볼트 너트를 재 채결하여 누유 방지하였음

- 신축이음부 누수, 배수구 누수, LMC 및 PSMA 교면 포장 균열 사항은 `18년 시행예정인 정밀점검 용역(하자점검 등)을 통하여 별도 하자관리

- 단, 인수·인계를 위한 전문가 합동점검결과 LMC포장 균열이 심화된 구간(북단RAMP-C, 1경간 40m)에 대하여는 품질확보 방안 등을 감안 `18.7.31.까지 전면 재시공(재시공 과정에서 잔여구간 시공상태를 조사하여 추가보수 여부 결정)

- 교량 공용 중 교통사고로 인해 교량 부속 시설물이 파손된 사항은 설계 또는 시공상의 문제로 볼 수 없어 우선 시설물을 인수 받고, 시설물 유지관리적 차원에서 보수 하고자 함.

Ⅳ		조 치 계 획

□ 구리암사대교는 2014.11월 개통되고 2016.12월 공사 준공되어 2년 이상 공용되고 있는 교량으로,

□ 점검 결과 60건의 지적사항 중 미조치 사항 4건은 교통사고로 인한 시설물 파손으로 설계 또는 시공상의 문제가 아니므로 교량 시설물의 유지관리 공백을 최소화 하고자 인수·인계를 우선 진행하고,

□ `18년 추진 중에 있는 구리암사대교 정밀점검 용역에서 면밀한 점검(하자검사 등)을 통하여 미비사항에 대하여는 추가 보완(하자보수 등)조치 하고자 함.

Ⅴ		향 후 계 획

□ ‘18.02. : 인수·인계 및 시설물 관리(교량안전과)

□ ‘18.03. : 정밀점검 용역 착수

붙임 : 1. 인수시설물 현황 1부.
2. 구리암사대교 평면 분할 도면 1부.

3. 구리암사대교 준공 후 유지관리방안 1부.

4. 인수인계서 1부.

5. 인수인계 현황 및 목록 1부.

6. 하자보증서 1부.  끝.