등록번호

푸른도시과-2221

주무관

공원관리팀장

푸른도시과장

안전건설교통국장

등록일자

2018.2.6.

지민수

김은종

양종수

02/06

이경우

결재일자

2018.2.6.

공개구분

대시민공개

협  조

유니버설디자인 통합놀이터 조성 사업계획

서 대 문 구

푸른도시과

사전 검토 항목
☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목		검토 여부 ( ■표시 )
구민참여 등 고려여부	구민	유 ■ ☞ 방법( 주민설명회 개최 등 )		해당무 □
	협치파트너	유 □ ☞ 방법( )		해당무 ■
	이해당사자	유 □ ☞ 방법( )		해당무 ■
	전문가	유 □ ☞ 방법( )		해당무 ■
	기타	유 □ ☞ 방법( )		해당무 ■
관계기관 및 부서협의	관계기관·단체	유 □ ☞ 기관명( )		해당무 ■
	관련부서	유 ■ ☞ 부서명( 서울시 도시공간개선단 )		해당무 □
관련법령	법령규정	검토 ■ ☞ 법령명( 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률, 어린이놀이시설 안전관리법)		해당무 □
	공직선거법	검토 □ ☞ 저촉여부( )		해당무 ■
	조례 및 규칙	검토 □ ☞ 조례규칙명( )		해당무 ■
재원확보 및 처리절차	예산확보	구비 □ 시비 ■ 국비 □ 기타 □ ( )		해당무 □
	처리절차	투자심사 □ 용역심사 ■ 심의 □ 기타 □		해당무 □
갈등관리	해소방안	대책마련 □ 이해조정 □		해당무 ■
홍보	홍보수단	보도자료 ■ 소식지 □ SNS □ IPTV □ 기타 □ ( )		해당무 □
기타 고려사항	기타	고용효과 □ 성인지 □ 장애인 ■ 노인 ■ 아동 ■ 한부모가정 □ 안전 ■ 유지관리비용 ■ 기타 □ ( )		해당무 □
바른 우리말	행정순화어	불필요한 외국어·외래어 사용여부		검토완료 ■

유니버설디자인 통합놀이터 조성 사업계획

기 조성된 공원 내 노후 공원시설물을 정비하여 누구나 안전하게 이용할 수

있는 공원으로 재조성하고자 함.

1. 추진근거

□ 2017년 특별조정교부금 교부 알림(정책기획담당관-23511호, 2017. 12. 8.)

2. 추진방향

□ 연령, 장애 유무 관계없이 함께 이용가능한 통합놀이터 조성

□ 기존의 환경(주거, 지형 등)을 고려하여 최대한 이용에 불편이 없도록 조성

3. 공원현황

□ 위    치 : 실락어린이공원(홍은동 455-4)

□ 규    모 : 17,452㎡

□ 시설현황 : 배드민턴장 2면, 체육시설 워밍암 등 12종 16조, 정자 4조, 벤치 19조

□ 주변현황

○ 인근 주민들이 산책과 운동을 하는 산지형 공원으로 주 산책로는 경사가 낮고

순환형이며, 공원 입구부터 옥천암까지 북한산 무장애자락길이 연결되어 있음

○ 인근에 어린이공원이 없어 놀이공간이 부족함

4. 추진개요

□ 사 업 명 : 유니버설디자인 통합놀이터 조성사업

□ 사업기간 : 2018. 1. ~ 10.

□ 사업내용 : 산책로 정비, 통합놀이터 조성, 노후 공원시설물 교체 등

□ 소요예산 : 700백만원(특별교부금 – 명시이월사업)

□ 추진일정

○ 2018.   2.  6. : 계획 수립, 용역 계약심사 의뢰

○ 2018. 2. ~  5. : 용역 시행, 주민 의견 수렴, 도시시설개선단 자문 등

○ 2018. 5. ~ 10. : 공사 시행 및 준공

붙임  위치도 및 현황사진 1부.  끝.