문서번호	건축부-1715
결재일자	2018.2.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		문화시설과장	건축부장
이진영		윤용훈	02/06 임인구
협조

『북한산성 대성문 해체·보수공사』

2차 공사 계약시행 검토보고

2018. 2.

도시기반시설본부(건 축 부)

『북한산성 대성문 해체·보수공사』

2차 공사 계약시행 검토보고

우리 본부가 시행중인『북한산성 대성문 해체·보수공사』의 2차 공사 계약시행에 대하여 검토 보고 드립니다.

Ⅰ		공사개요

○ 위    치 : 성북구 정릉동 북한산성 대성문(사적 제162호)

○ 공사내용(해체·보수 범위)

- 문  루 : 바닥면적 35.24㎡, 높이 5.7m

- 육축부 : 높이 5.5m, 폭 12m, 너비 8m

○ 사업기간 : 2016.05. ~ 2018.08.

- 설 계 : 2016.05. ~ 2016.12.

- 공 사 : 2017.05. ~ 2018.08.

○ 총사업비 : 1,300백만원(공사비 1,210 / 설계비 53 / 감리비 30)

○ 시공/감리 : 원택건설㈜ / ㈜경복영건

○ 현장사진

성곽쌓기(외부)	성곽쌓기(내부)

Ⅱ		추진경위

○ 2017. 02. : 공사착공(1차 공사)

○ 2017. 06. : 헬기운항 허가 및 가설자재 운반

○ 2017. 07. : 가설휀스, 우회등산로 설치

○ 2017. 08. 22 ~ 09. 22. : 제1,2차 전문가 자문회의

- 홍예 처리 방안, 문루부 목부재 교체 및 육축부 심석설치 범위 등 자문

○ 2017. 11. 16. : 제3차 전문가 자문회의

- 육축부 석재교체 범위 및 홍예해체 처리방안 등 자문

○ 2017. 12. : 육축 및 문루해체 완료

○ 2018. 02. 02. : 설계변경 소위원회(전문가 자문결과 설계 변경에 반영)

○ 2018. 02. 05. : 문화재감리·시공사 2차 공사 계약요청

○ 2018. 02. 현재. : 1차 공사 진행 중(성곽 쌓기 공사 중)

Ⅲ		계약내용 검토

○ 계약금액 및 공사기간  ▶ 상세내역 붙임문서 참조

구 분	계약금액	공사기간	비 고
총 차	1,211,161,000	2017.02.28.~2018.08.27
1 차	957,500,000	2017.02.28.~2018.02.27
2 차	253,661,000	2018.02.28.~2018.08.27

○ 주요공종

- 가설공사, 기단공사, 목공사, 단청공사 및 수장공사, 운반공사 등

○ 예산관련

- 문화본부 한양도성도감과, 한양도성 보존·관리활용, 북한도성 보존·정비, 시설비(401-01)

Ⅳ		문화재 감리원 검토의견

○「북한산성 대성문 해체·보수공사」2차분 도급공사의 공정계획 및 내역을 검토한 결과 발주처 예산 집행계획 및 공사기간을 고려하여 각 공종별 공정계획이 적정하게 수립된 것으로 판단됨.

○	다만, 향후 여건에 따라 공정계획이 변경 될 수 있고 공사 진행 중 일부 물량의 증감이 발생할 수 있어 추가 설계변경 또는 준공 시 정산 반영하는 것이 필요함.

Ⅴ		처리의견

○	문화재 감리원의 검토 의견과 같이 요청 내역이 적정한 것으로 판단되어 2차 공사 계약요청을 승인하고, 계약부서에 의뢰하여 계약 체결코자 함.

○	아울러, 1차공사 설계변경에 따른 변경사항에 대한 2차공사 반영여부는 적정성을 검토하여 시행코자 함.

붙임 : 1) 문화재 감리자 2차공사 계약요청 검토보고(공문) 1부.

2) 문화재 감리원 기술검토 의견서 1부.

3) 시공사 2차공사 계약 요청서(공문) 1부.

4) 내역서 및 2차공사 예정공정표 1부.  끝.