	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	토양오염 정화조치 연장 요청

1. 성북구청 환경과-4734호(2017.02.15.)와 관련입니다.

2.“정릉동 공영차고지 건립공사 설계용역 토양환경평가”와 관련하여 부득이하게 이행기간내에 정화조치가 곤란하여「토양환경보전법 시행령」제5조의8(정밀조사명령 등)에 의거 이행기간을 연장코자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 사업장명 : 정릉동 공영차고지 건립공사 설계용역

나. 연장기간 : 1년 (2019.2.14.까지)

다. 연장사유 : 공사 미착공으로 인한 연장 (현재 기본 및 실시설계 용역 중)

3. 아울러, 도시기반시설본부(건축부)에서는 사업추진시 토양정화업자에게 위탁하여 정화하고, 오염토양 정화공사 착공 7일전까지 성북구청(환경과)에 오염토양 정화계획서를 작성·제출하고, 정화 완료시 이행보고서를 성북구청(환경과)에 작성하여 제출하시기 바랍니다.  끝.

붙임 : 관련공문 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	성북구청장(환경과장),서울특별시도시기반시설본부장(건축부장)
주무관	김은진		차고지관리팀장	강철규		주차계획과장	02/07 이병수
협조자
시행	주차계획과-1744	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문청사1동 6층 주차계획과	/
전화	02-2133-2372	/전송	02-2133-1051	/	12345k@seoul.go.kr	/	부분공개(5)