문서번호	치수과-523
결재일자	2018.2.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
최혜경		신용철	02/08 최진석
협조

물가변동에 의한 계약금액 조정

(한강공원 나들목공사 건설사업관리용역)

2018. 2.

시 설 부

치 수 과

물가변동에 의한 계약금액 조정

「한강공원 나들목 신설 및 개선(망원 등) 감독권한대행 건설사업관리 용역」계약사로부터 물가변동에 의한 계약금액 조정요청이 있어 이에 대한 검토보고임.

Ⅰ		관련근거 및 규정

○ 동일(감리) 제18-302호(2018.02.06.) 계약금액 조정요청

○ 지방계약법 제22조(물가변동 등에 따른 계약금액의 조정)

○ 지방계약법 시행령 제73조 및 시행규칙 제72조(물가변동에 의한 계약금액 조정)

○ 용역계약 일반조건(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)

Ⅱ		용역개요

○ 용 역 명 : 한강공원 나들목 신설 및 개설(망원 등) 감독권한대행
건설사업관리용역

○ 사업위치 :

- 망원나들목 : 서울시 마포구 마포나루길 407일원

- 광진교남단 : 서울시 강동구 암사동 532-2 일원

- 잠실․잠실나루 : 서울시 송파구 잠실동 1-1 및 신천동 1-1 일원

○ 사업개요 :

- 망원나들목 - 보행 나들목 신설(B5m H3.5m L74.5m)

- 광진교남단 - 차량 나들목 신설(B5m H3.5m L73.8m)

- 잠실·잠실나루 – 나들목 개선(차수벽 철거 및 육갑문 설치)

○ 용역기간 : 2017. 11. 10. ∼ 2020. 05. 10.

○ 용 역 비 : 1,508,000천원

○ 감 리 사 : ㈜동일기술공사, ㈜이산, ㈜신성엔지니어링

Ⅲ		계약금액 조정 요청

○ 계약금액 조정대상

직전조정기준일 (기준시점)	조정기준일 (비교시점)	물가변동 경과일수	품목조정율	조정신청일	90일 경과 3%이상
’17.10.24.	’18.01.23.	90일	3.90%	’18.02.07.

○ 계약금액 조정 내용

물가변동 조정율(A)	3.90%	물가변동 경과기간		90 일	계약체결일(기준시점)		2017년 10월 24일
					조정기준일(비교시점)		2018년 01월 23일
계약금액(B)		1,508,000,000			조정기준일 현재의감리원투입현황		전체		108.20인월
							계획투입		8.41인월
							실 투입		8.41인월
물가변동적용제외 계약금액[C]			121,820,700			물가변동적용대가 [D](D=B-C)		1,386,179,300
선급금			100,000,000			선급금 지급비율 [E]((선급금/B)×100)		6.63%
물가변동등락대상조정금액 [G](G=A×D)			54,000,000			선급금공제금액 [F](F=D×A×E)		3,600,000
물가변동조정적용금액 [H]=(G-F)			50,400,000			변경후 도급액 (B+H)		1,558,400,000

Ⅳ		검토보고

○ 계약금액 조정요건 : 2가지 조건 동시 충족

- 계약체결 후 또는 직전 물가변동으로 인한 계약금액 조정일로부터 90일 경과

- 품목조정률이 100분의 3이상 증감된 경우

○ 계약금액 조정대상 여부 : 조정 대상

Ⅵ		조치의견

○ 물가변동으로 인한 계약금액조정 요청건에 대하여 관련규정에    따라 검토결과, 위 보고내용과 같이 계약금액 조정이 타당한 것으로   판단되므로 추후 설계변경시 반영코자 함.

○ 계약금액 조정

구분	도급금액	물가변동 조정율	물가변동 적용금액	변경후 도급액
	1,508,000	3.90%	50,400	1,558,400

붙 임 : 물가변동으로 인한 계약금액 조정신청 1부.  끝.