문서번호	도시철도설비부-1366
결재일자	2018.2.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
박지영		이덕한	02/08 구자훈
협조

『 지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사(전기) 』

신호변압기 설계변경 실정보고 검토

2018. 2.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

『 지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사(전기) 』

신호변압기 설계변경 실정보고 검토

지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사(전기) 시행중 신호변압기 물량감소와 관련, 감리단으로부터 접수된 실정보고 사항을 검토하여 보고함. (※935정거장 신호기계실 삭제에 따른 신호변압기 실정보고 : 유신감(921)18-75호)

□ 추진배경 및 근거

❍ 935정거장 신호기계실(신호변압기 포함)이 신호분야 선로전환기 배치 위치와      상이하게 935정거장 설계에 반영되어 있어 이를 신호분야설계와 동일한 934      정거장으로 신호변압기를 설계에 반영시키고 935정거장 신호변압기를 삭제함

❍ 934정거장 신호기계실 관련 회의결과 보고(도철설비부-2761, ‘17.3.6)

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 서울지하철9호선3단계921공구 건설공사

❍ 공사기간 : ’09. 12. 31 ~ ’18. 12. 31

❍ 계약금액 : 총 176,687백만원 (전기 – 9,586백만원)

❍ 계 약 자 : (주)포스코건설(주) 외 1개사

❍ 감 리 단 : ㈜유신 외 1개사

□ 검토사항(실정보고내용)

❍ 변경물량

항 목	규 격	당 초	변 경	증 감	비고
변압기 (6.6KV/220V)	75KVA	2대	0	감) 2대
전선관	ST 70C	230 M	0	감) 230 M
케이블	HFCO 240㎟/1C× 2	682 M	0	감) 682 M
	HFCO 120㎟/1C× 1	330 M	0	감) 330 M

❍ 공사비 증감내역

(단위 : 천원)

위 치	당 초	변 경	증 감	비고
935정거장	10,300,300	10,219,991	감) 80,308
계	10,300,300	10,219,991	감) 80,308

□ 조치내용

❍ 검토 결과 935정거장 신호변압기 및 전선관, 케이블의 감소물량이 적정한      것으로 판단됨.

❍ 따라서, 신호변압기 설치와 관련하여 일체의 물량을 삭제하고 시공토록      승인조치하고자 함.

□ 행정사항

○ 실정보고사항 승인통보(감리단)

붙임 : 실정보고 감리단 공문 1부.