문서번호	도로관리과-2460
결재일자	2018.2.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로관리팀장	도로관리과장
최현		최연우	02/08 박문희
협조

동공탐사용역 공정회의(최종/월간) 결과보고

2018. 2.

서울특별시 도로관리과

동공탐사용역 공정회의(최종/월간) 결과 보고

□ 회의개요

○ 일    시 : ’18. 2. 7(수) 16:00 ~ 18:00

○ 장    소 : 도로관리과 회의실

○ 안    건 : 2017-2단계(최종보고), 2017-3단계(월간보고)

○ 참    석 : 도로관리과장, 도로굴착관리팀장, 업무담당 2명

○ 발    표 : 지케이엔지니어링(17-2), 광성지엠(17-3)

□ 추진실적

○ 탐사실적(’18.1.31 기준)

구분		연장(㎞)			동공(개)			목표	적중률 (미달포함)
	계획	탐사	분석	분석	제척(GPR)	천공	발견
계	2,061	1,790	1,677	1,905	401	1,384	1,163	1,087
2단계	614	614	614	439	43	396	337	311	85.1% (88.1%)
3단계	466	466	466	672	229	323	280	246	86.7% (99.1%)
※1단계 (준공)	981	981	981	794	129	665	546	530	82.1% (90.1%)

- (2017-2단계)

□ 목표동공 311개 보다 26개 초과 달성, 추가과업 완료

□ 최종보고서 등 성과품은 실무자 회의(1.31~2.7)를 통해 검토완료

※ 성과품 검토요청(2018.1.30, GK(엔) 제18-012호)

- (2017-3단계)

□ 목표동공 246개를 초과하였으나 잔여 분석동공 120개 2차조사 실시

□ 공정회의 주요내용

○ 최종보고(17-2단계)

- 보고자료에 동공 등급별 분포비율 추가 및 오탈자 수정

- 최종성과품 검토 실무자회의시 요청사항은 조속히 수정․보완제출

○ 월간보고(17-3단계)

- 2차조사 작업시 ‘안전관리대책’ 및 ‘경찰서 신고’ 내용을 준수하여 교통통제하고 안전한 작업장 확보 후 실시

- 지속되는 한파에 따른 작업자 건강상태 수시확인, 보온용품․안전장구 지급 및 착용 철저 이행(작업전 교육실시)

- 천공작업시 발생되는 천공수 처리 등 동절기 현장관리 철저

- 보고자료 공정계획표는 계획․실행 일정이 함께 표현 요망

- 보고자료에 동공 등급별 분포비율 추가 및 오탈자 수정

- 추가과업 중 ‘흙의 유실속도 시험’ 동절기를 피하여 실시하고 하수도가 인접한 동공실험시 색소 등을 이용하여 물의 흐름추적(하수도 유입)

별도 : 보고자료 2부.  끝.