의원 요구 자료 제출

시 행	경제정책과-1746
결재일자	2018.2.9.
공개여부	부분공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	기획담당관

주무관		도시제조업팀장	경제정책과장	경제기획관	경제진흥본부장	결재
노동영		김근태	김경탁	김태희	02/09 강태웅
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 116번, 박홍근 의원, 과학기술정보방송통신위원회)

따로붙임 : 도시제조업 지원 스마트 앵커시설 후보지 선정 자치구 공모계획 1부.  끝.

박홍근 의원(과학기술정보방송통신위원회, 더불어민주당)

요구번호 : 116번

시가 발표한 5개년 혁신성장 프로젝트 중 중랑구 패션지원센터 스마트앵커시설 등 중랑구 관내 지원 상세계획 및 부속서류 자료 일체

중랑구 관내 스마트 앵커시설 지원계획은 다음과 같습니다.

□ 도심제조업 스마트 앵커시설 건립개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 총 조성개수 : 20개소(연차별 4~6개소 건립)

○ 총 건립비용 : 3,120억원

○ 대상지역 : 봉제, 인쇄, 주얼리, 기계금속 등 제조업 집적지(149개)

○ 입주업체 수 : 1000개(앵커당 평균 50개 업체)

□ 조성 및 운영방안

○ 조성방안 : 서울 관내 집적지 인근 공공부지 복합개발(장기임대)

－ SH공사 등을 통한 위탁개발, 장기임대수익을 통한 투자금 회수

－ 앵커당 건립비 약 156억원(공공 60%+민간 40%)

○ 주요기능

－ 제조시설 현대화, 공정자동화를 통한 품질관리

－ 공동작업장 조성, 협동화 사업을 통한 협업체계 강화

－ 디자인-제조-유통‧마케팅-판매 연계를 통한 도심제조업의 고부가가치화

○ 공간구성(안)

○ 운영방안 : 민간주도 운영을 통한 재정지원 최소화

－ 소공인 대상 협동화사업을 통하여 조합 결성 및 운영

□ 세부 추진계획

○ 2018년은 시범사업 추진을 통한 성공사례 발굴 및 확산기반 마련

－ 서울시-자치구(중랑, 성북, 중구)간 스마트앵커 조성 업무협약 체결

※ 성동구는 시유지 개발로 업무협약 체결 제외

－ 1개소(성동) 착공, 3개소(중랑,성북,중구) 타당성 조사 진행

－「국가-시 공동‧협력사업」(국비:시비:민자=3:3:4) 추진 대정부 건의

구분	부지 개요	주요 집적산업	비고
중랑구	‣중랑구 상봉동 110-38,39 ‣1,568㎡ / 제2종일반주거 ‣이용현황: 주차장(고물상)	‣봉제산업 중랑 봉제업체 : 2,447개 (서울 봉제업체의 10.5%)	면목 패션봉제 특정개발 진흥지구
성북구	‣성북구 월곡동 226-4 ‣1,596㎡ / 제3종일반주거 ‣이용현황: 주차장(대지)	‣봉제산업 성북 봉제업체 : 1,763개 (서울 봉제업체의 7.6%)
중구	‣중구 예관동 52-11 ‣1,200㎡ / 일반상업지역 ‣이용현황: 건물점유(철거예정)	‣인쇄산업 중구 인쇄업체 : 5,532개 (서울 인쇄업체의 66.7%)	중구 인쇄특정개발 진흥지구
성동구	‣성동구 성수동2가 277-34 ‣559㎡ / 준공업지역 ‣이용현황: 공장(증축예정)	‣수제화산업 성동구 수제화업체 : 515개 (서울 수제화업체의 86%)	도시형 소공인 집적지구

○ 스마트앵커 입주 조합 결성을 위한 TF 운영

－ 공무원(시, 자치구), 소공인, 분야별 전문가로 구성된 TF 운영을 통해 스마트앵커 운영 가이드라인 마련

－ 소공인 협동화 사업을 통해 스마트앵커 입주 조합 결성 촉진

○ 향후 5년간 사업 성과평가에 따라 스마트앵커시설 20개소 확산

－ 집적지별 사업 후보지 지속 발굴 및 단계별 확산 추진

○ 중랑구 관내 대상부지는 2018년도 시범사업 후보지로 선정되어 타당성조사를 진행할 계획입니다.

따로붙임 : 도시제조업 지원 스마트 앵커시설 후보지 선정 자치구 공모계획 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (경제정책과)	담당사무관	김근태
	☎02-2133-5248	주무관	이윤슬
	작 성 일 : 2018.2.5

이곳에 본문을 입력하세요