문서번호	시설보수과-1095
결재일자	2018.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
홍정식		이근봉	02/09 신응수
협조	도로보수과장		김학동
	기전과장		최태용

2018년 풍수해 대비

수방시설 및 수해취약지역 일제점검ㆍ정비 계획

2018. 2.

북부도로사업소

(시설보수과)

2018년 풍수해 대비

수방시설 및 수해취약지역 일제점검ㆍ정비 계획

2018년도 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역에 대한 일제점검ㆍ정비계획 보고 임

Ⅰ		추진근거

□ 2018년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 시행

(하천관리과-1824, 2018.2.2.)

Ⅱ		점검개요

□ 점검대상

❍ 수방시설

- 지하차도 배수펌프(6개소) : 창동, 녹천, 방학, 하계, 월계, 월계2·3

※ 솔샘, 공릉지하차도 : 자연배수

❍ 수해취약지역

- 도로시설물(6개소)

ㆍ 지하차도(6개소) : 창동, 녹천, 방학, 하계, 월계, 월계2·3

- 도로사면(11개소)

ㆍ 옹벽(6개소) : 방학동 520-1 외 5개소(붙임 점검대상 현황 참조)

ㆍ 비탈면(5개소) : 성북동 산25-61 외 4개소(붙임 점검대상 현황 참조)

□ 점검기간

【1차 점검 및 정비】

❍ 점검 책임자 : 시설물 담당 부서장

❍ 점검 기간   : ‘18. 2. 19. ~ 3. 30.

- 시설물 담당, 외부 전문가와 합동 점검(기전과 : 자체점검)

- 경미한 사항은 현장에서 즉시 정비조치

❍ 지적사항 정비 : ‘18. 3. 2. ~ 3. 30.

【2차 점검 및 정비】

❍ 점검 책임자 : 소장

❍ 점검 기간   : ‘18. 4. 2. ~ 4. 20.

- 1차 점검 미조치 사항 위주 집중점검

❍ 지적사항 정비완료 : ‘18. 4. 2. ~ 4. 30.

□ 점검방법

❍ 해빙기 점검과 병행하여 외부전문가, 공무원 합동점검(2~3인/1조)

※ 수방시설 : 기전과 자체점검(2인 1조) 시행

❍ 중점점검사항

- 지하차도 : 배수펌프 시험가동, 집수정 토사 퇴적 등 점검

- 옹벽, 비탈면 : 낙석 등 점검

□ 점검결과 조치

❍ 경미한 사항은 직영반(공무직) 즉시 조치

❍ 보수 규모가 크고, 긴급을 요하는 대상시설은 담당부서에서 별도 계     획 수립하여 단가업체 조치

Ⅲ		행정사항

❍ 협조사항 : 기전과, 도로보수과

- 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 및 정비결과 시설보수과 제출(2018.3.30.)

❍ 점검계획 및 대상 현황 제출 : 하천관리과(2018.2.14.)

❍ 1차 지적 및 조치결과 제출 : 하천관리과(2018.4.6.)

❍ 2차 지적 및 조치결과 제출 : 하천관리과(2018.5.4.)

따로붙임 : 1. 점검대상 현황 1부

2. 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 및 정비결과 보고 양식 1부.  끝.