	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	현장대응단 화학차(14호) 수리 기간 연장 알림

1. 관려문서

가. 소방행정과-454(2018.1.10.)“현장대응단 화학차(14호) 정밀점검 결과에 따른 수리

계획 보고(알림)”

나. 소방행정과-17658(2017.12.15.)“현장대응단 화학차(14호) 교통사고에 따른 공장

입고 및 수리계획(알림)”

2. 위와관련 현장대응단 화학차(14호) 교통사고 및 정밀점검 수리 진행 중 수리업체에서

부품 수급 및 차량 도장 등으로인하여 수리 지연 통보 받아 다음과 같이 알려드리니

업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 차량 현황 : 화학차(14호) 82가 2382

나. 수리기간 : 2017. 12. 18.(월) ~ 2018. 2. 28.(수)

→ (변경 전) 2017. 12. 18.(월) ~ 2018. 2. 12.(월)

다. 연장사유 : 부품 수급 및 차량 도장 등 수리지연

라. 수리업체 : ****************

- *************************************

붙임 : 수리업체 연장사유서 1부.  끝.

담당자	오창훈		장비회계팀장	황인대		소방행정과장	02/09 代김종호
협조자
시행	소방행정과-2092	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 문래로197 소방행정과 장비회계팀	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02)2678-0307	/전송	02)26371025	/	och0127@seoul.go.kr	/	대시민공개