문서번호	급수운영과-3413
결재일자	2018.2.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		강서수도사업소장
주은선	김남구	김정수		02/12 홍순성
협 조	시설관리과장		고신석
	주무관		정수용
	주무관		손현정
	주무관		이상욱
	주무관		이슬

2018년

소블록 배급수관망 개선사업 추진계획

2018.  2.

강서수도사업소

2018년 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획

건강하고 맛있는 아리수를 단수 또는 정체없이 공급하기 위한 2018년 소블록 배급수관망 개선사업에 대한 추진계획을 수립 시행하고자 함

※ 관련근거 : 2018년 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획

(누수방지과-530호, ’18. 1. 16)

□ 현  황

○ 사 업 명 : 2018년 소블록 배급수관망 개선사업

○ 사 업 비 : 465백만원

○ 정비대상 : 단절관정비 8개소, 552m

○ 사업목적

- 단일배관 이중화로 무단수 급수체계 구축

- 단절 구간을 순환관망으로 형성하여 깨끗한 아리수 공급

<단일배관 이중화>                            <단절관 순환관망>

	➡

□ 추진계획

○ 추진실적 및 계획

구분	총계	추진실적					추진계획
		소계	’14년	’15년	’16년	’17년	소계	’18년	’19년 이후
사업비 (백만원)	1,875	692	131	1	307	253	1,183	465	718
대상(개소)	66	21	7	2	2	10	45	8	37
연장(㎞)	3.4	1.66	0.2	0.1	0.4	0.96	1.74	0.55	1.19

○ 2018년 추진계획

- 소블록 배급수관망 개선 : 8개소(552m) 465백만원

∙ 단절관 순환관망 : 8개소(552m), 465백만원

- 세부 추진내역

사업명	위치	공사개요	사업비 (천원)	공사기간	담당자
계		552	465,000
단절관 순환관망 (8건)	목동 318-112~113	D 80㎜, L=9m	4,000	‘18.3월~11월	여수현 (시설7)
	목동 609-24~25	D 80㎜, L=32m	13,000	‘18.3월~11월
	신월2동 447-12~2	D 80㎜, L=70m	28,000	‘18.3월~11월	이상욱 (시설7)
	신정2동 129-13	D 100㎜, L=25m	15,000	‘18.3월~11월	이슬 (시설8)
	신정4동 938-1	D 100㎜, L=20m	10,000	‘18.3월~11월
	염창동 218-2~287-1	D 150㎜, L=132 m	95,000	‘18.3월~11월	손현정 (시설7) 홍성철 (시설8)
	염창동 277-14~272-9	D 150㎜, L=160m	180,000	‘18.3월~11월
	염창동 260-7~283-21	D 100㎜, L=104m	120,000	‘18.3월~11월

- 추진방법 : 연간단가업체 작업지시하여 정비(공사건별 도급액 20백만원 이하)

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 11.

※ 염창동 277, 260번지 구간은 양화교교차로~정보화진흥원간 송배수관정비공사시

연결공사 시행(동일 관로구간임)

□ 행정사항

○ 사업 추진계획 수립 보고서 제출(본부 누수방지과)

○ 담당자는 단절관 순환관망 공사 추진에 차질이 없도록 제반사항 조치 및 가급적 2018년 상반기 이전 정비 완료

붙임 : 단절관 순환관망 연차별 정비 추진대상. 끝.