투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	실정보고 승인 통보 및 공정관리 철저요청(봉제박물관 건립공사)

1. 시봉*******09(2018.02.08.)호와 관련입니다.

2.『봉제박물관 건립공사』와 관련하여 제출된 “실정보고(BF본인증 추가공사 및 옹벽공사 수량증가 등에 관한 실정보고)” 에 대하여 승인하오니 공사추진 및 안전관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

3. 아울러, 계약금액 결정은 향후 설계변경 절차에 따라 조정 될 예정임을 알려드리오니 업무수행에 차질 없으시기 바랍니다.

4. 또한, 마무리공사 진행 시 미진공정(창호유리공사 등)으로 인해 준공에 차질이 발생되지 않도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	봉제박물관 건립공사 건축사감리 설정훈 귀하,봉제박물관 건립공사 현장대리인 최황도 귀하
주무관	이원기		환경시설과장	유현수		건축부장	02/12 임인구
협조자
시행	건축부-2043	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/		/	부분공개(5)