문서번호	건축부-2068
결재일자	2018.2.12.
공개여부	부분공개(6)

★주무관	문화시설과장	건축부장			결재
이진영	윤용훈	02/12 임인구
협 조
	주무관		주한종

설계변경 위원회 (재)자문요청 상정보고서(북한산성 대성문 해체·보수공사)

문서번호		요청부서		문화시설과		요청일		2018년 1월 18일
공 사 명	북산산성 대성문 해체․보수공사(문화재 보수공사)
공사개요	공사규모		문루(바닥면적 35.24m, 높이 5.7m), 육축부(높이 5.5m, 폭 12m, 너비 8m)
	공사기간		2017.02.28. ~ 2018.08.27(1차: 2017.02.28~2018.02.27)
	감 리 사		(주)경복영건
	설 계 사		강희재건축사사무소
	시 공 사		원택건설(주)
자문 안건명			북한산성 대성문 해체·보수공사 설계변경 자문요청				요청금액		101,654,000원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항 □ 부서(담당별)간 조정·통합이 필요한 경우
설계변경 유형			□ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) 설계내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 현장여건 상이 □ 제도, 기준변경 □ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 문화재 전문가(문화재청 위원) 자문결과 반영, 공사범위 변경, 현장여건 상이 등
원설계자 의견(요약) ○ 문화재 보수공사 특성상 해체전 설계가 이루어짐에 따라 해체 후 변경사항(추가물량 발생 등)은 불가피함
주 요 변 경 내 역 및 공 종
◼ 변경개요 설계도서 변경 : 육축 배부름현상 부위 추가해체,문루부 부재변경 물량 중가 등 문화재 자문위원 요청사항 : 홍예존치, 성곽배부름 현상 등 변형부위 추가해체보수 요망, 문루부 목구조재 추가교체 필요 등 ◼ 물량증감내역 (내역서 참조)					◼ 공사비 증감내용 당초 :1,211,161,000원 변경 :1,312,815,000원 (증101,654,000원) ◼ 설계변경 주요 공종 -문루 및 육축(성곽) 해체·보수공사
별첨서류	※ 설계변경 소위원회 자문요청서 등 3부					▪ 소요관급자재 - 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	북한산성 대성문 해체보수공사
계약금액	957,500,000원	계약일	2017.02.22	시공사	원택건설(주)
공사기간	2017.2.28 ~ 2018.08.27	낙찰율	86.70%	설계자	강희재건축사사무소
계약형태	공개(제한)경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사( )			감리자	(주)경복영건
공사규모	문루 및 육축 전면 해체보수공사 문루(바닥면적 35.24m, 높이 5.7m), 육축부(높이 5.5m, 폭 12m, 너비 8m)			※ 작성자 : 업무담당(이진영) (☎3708-2630)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	비 고
변 경 개 요	변경도서 참조
공 사 비	1,211,131,000원		1,312,815,000원	증)101,654,000원
적 용 요 율	계약단가 및 낙찰율(86.70%)
설계변경요구자	□ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 (제13장 공사계약 일반조건 제7절 계약금액의 조정)
설계변경 근거	방 침 (실정보고 승인)	건축부-300(2018.01.08.)호
	관련규정	지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 (제13장 공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경)

구 분	설 계 변 경 전	설 계 변 경 후	증/감
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ② 설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이 ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	①문루 초석받침석 교체 ②문루 목부재 및 기와 등 교체물량 추가 ③방염도포 및 단청물량 추가 ④육축부 성곽돌 교체 및 가공물량 중가 ⑤헬기 및 자재소운반 등 양중물량 증가 등
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

설계변경 자문 소위원회  귀중