투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사 책임건설사업관리기술자
(경유)
제목	공사 재개 및 감리 재배치 지시

1. 설비부-737(2018.1.18.)호와 관련입니다.

2. 종로 중앙버스 전용차로 개통에 따른 시민불편 최소화를 위해 중지하였던 종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사를 아래와 같이 재개함과 동시에 감리 재배치를 지시하오니 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사재개 및 감리 재배치

구 분	중지기간	공사재개 및 감리 재배치	비고
종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사	공사 : `18. 1.15. ~ `18. 2.19. 감리 : `18. 1.20. ~ `18. 2.19.	`18. 2.20.

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	진종구		녹색성장과장	02/12 오삼록
협조자
시행	설비부-1871	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8636	/전송	3708-8659	/	jin0652@seoul.go.kr	/	대시민공개