문서번호	건축부-2173
결재일자	2018.2.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축관리과장	건축부장
강석문		차무흥	02/13 임인구
협조

『스페이스 살림 조성공사』

고강도 콘크리트 말뚝 실정보고 검토보고

2018.  2.

도시기반시설본부

건 축 부

『스페이스 살림 조성공사』

고강도 콘크리트말뚝 실정보고 검토보고

『스페이스 살림 조성공사』관련 건설사업관리단으로부터 토공사(흙막이)와 기초파일공사 간섭부분에 대해 기초파일 선 시공 공법을 채택하여 공사를 시행코자, 관급자재로 분류된 콘크리트말뚝의 일부를 사급으로 전환요청 하는 실정보고가 있어 검토보고 드림.

1		사업개요

위    치 : 서울시 동작구 대방동 340-3호외 3필지

규    모 : 지하2/지상7층, 연면적 17,621㎡/ 신축

공사기간 : 2017.12.26 ~ 2018.4.25.(총차 : 2017.12.26. ~ 2010.6.25.)

시 공 사 : ㈜호반건설 외 2개사

감 리 자 : ㈜희림종합건축사사무소 외 1개사

공 사 비 : 2,068,000,000원 (총차 : 17,209,000,000원)

2		실정보고 내용

관련근거

- 실정보고(고강도콘크리트말뚝 사급전환)승인 요청

HTSC 1802-07(2018.2.13.)

실정보고 사유

- 설계도서와 부지현황에 따른 토공사 공법을 검토한 결과, 터파기 공사후 기초파일 시공시, 버팀보 및 흙막이벽이 간섭되어 파일항타 장비 운행이 어려워 공정에 차질이 예상됨에 따라,

- 간섭되는 기초파일을 선 시공후 토공사를 진행하고자 우선 시공분(2월 사용) 파일 물량을 사급으로 전환하여 즉시 시공코자 함.

※ 관급자재로 구매(입찰공고)시 약 30일 소요.

실정보고 내용 및 공사비 증감

- 관급자재 사급전환 수량

구분	품명	규격	단위	증감량			비고
				당초	변경	증감
****	*********	*************	*	*****	*****	******
****	*********	*************	*	*	*****	******

- 사급전환에 따른 원가계산

구분	품명	변경전(원)	변경후(원)	증감(원)
****	*********	************	***********	***********
********************************************************************************************

3		감리자 검토의견

공사계약일반조건 제19조의 6에 의거 관급자재 선정일자와 1차수 공사일정을 감안하여 우선시공분에 대해서 사급으로 전환함이 적정함.

4		처리의견

지방자치단체 입찰 계약집행기준(제13장 공사계약 일반조건 제6절 공사설계의 변경)에 의거 설계변경 대상으로서,

책임건설사업관리자의 검토 의견에 따라 실정보고건은 승인하여 우선 조치하고, 추후 관련절차에 의거 계약금액 조정시 시공물량을 확인 도급비를 조정하고자 함.

붙 임 :  실정보고(고강도콘크리트말뚝 사급전환) 승인 요청. 1부. 끝.