문서번호	시설과-335
결재일자	2018.2.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장		동부공원녹지사업소장
최종성	송복식	진병규		02/14 이용태
협 조
	교육사업지원팀장		윤정호
	시설관리팀장		장창원

「2017 지방폐교 활용 가족자연체험시설 조성공사」

현장 점검 결과보고

2018. 02.

동부공원녹지사업소

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□	장애인편의시설 반영
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	지방폐교활용
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□	보도자료제출 등 (사업주관부서)
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

「2017 지방폐교 활용 가족자연체험시설 조성공사」

현장 점검 결과 보고

지방폐교를 활용한 가족자연체험시설 조성과 관련하여 공사 현장 점검을 실시하고 보고드림.

공사개요

❍ 공 사 명 : 2017 지방폐교 활용 가족자연체험시설 조성공사(봉화 황평분교)

❍ 위     치 : 봉화군 황평분교(경북 봉화군 소천면 홍점길 31)

❍ 공사기간 : 2017. 11. 2 ~ 2018. 2. 28

❍ 공 사 비 : 금313,200,000원(금삼억일천삼백이십만원)

(도급액:금279,254,680원 / 관급자재:금33,945,320원)

❍ 도 급 자

- 주계약자 : 주식회사 아이제이건설 대표 배석진

- 부계약자 : 주식회사 랜드콤프러스 대표 임공식

❍ 공사내용 : 교사동, 화장실, 샤워실 리모델링, 야영데크, 편의시설 설치

현장 조사 개요

❍ 일   시 : 2018. 2. 2.(금) 09:00 ~ 18:00

❍ 장   소 : 봉화군 황평분교

❍ 조 사 자 : 9명

- 서울시 교육정책과(3명) : 교육사업지원팀장, 담당 2

- 동부공원녹지사업소(2명) : 담당 2

- 경북 봉화군청(3명) : 담당 3

- 시 공 사(1명) : 현장소장

❍ 내   용 : 캠핑장 준공 및 개장에 따른 현장 점검

- 본관동 화장실 지붕 누수로 인한 지붕 보수 필요(현장 사항)

- 본관동 내 안전상 위험한 지장물 철거 필요(현장 사항)

- 야외테이블 20개 설치 필요(교육청책과 요청)

- 각 분야별 업무 협조를 통해 준공 및 개장에 차질 없도록 공사 진행

❍ 현장사진

본관동 화장실 지붕 누수 사진	현장 사진
현장 사진	현장 사진

검토의견

❍ 추가 공사 사항에 대하여 공사비(약25백만원)추가 배정 요청

❍ 추가 공사 사항에 대하여 설계변경 및 공사 시행

향후일정

❍ 2018. 2. 28 : 공사 준공. 끝.