문서번호	소방행정과-2267
결재일자	2018.2.20.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
백운봉	강석일	박철우		02/20 김재학
협 조

2018년 예산사업[시설비] 추진계획 보고

서초소방서 소방행정과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 예산사업[시설비] 추진계획 보고

2018년 우리서 시설물 유지보수를 위한 예산「5개사업, 230,254천원」에 대한 추진 계획임.

※ 청사보수보강 : 116,000천원 / 환경개선 : 26,000천원 /  내진 : 88,254천원

Ⅰ		사 업 개 요

사업추진기간 : 2018년 2월 – 2018년 6월

예산배정현황

- 예산과목 : 직무환경 개선/소방관서 시설물유지보수/시설비(401-01)

- 배정금액 : 230,254천원

⇒ 소방청사 보수·보강 : 116,000천원

⇒ 소방청사 환경개선 : 26,000천원

⇒ 방배 내진 보수·보강 공사 : 88,254천원

주요사업현황

- 본서 강당 흡음제 설치공사

- 서초센터 도배 및 타일 교체공사

- 본서 화장실 벽타일 교체공사

- 방배119안전센터 내진 보수·보강공사

- 서초·잠원119안전센터 직원식당 환경개선 공사

Ⅱ		추 진 계 획

사업별 세부추진계획

사업별	완료시기	추 진 내 용	비고
본서 강당 흡음제 설치	6월	강당 천정 및 벽면 흡음시설 강당 단상바닥 및 벽면 흡음시설 ※ 흡음제 공사시 외부 음향전문가에게 스피커 등에 대해 업무 협의 및 조언
서초센터 도배 및 타일 교체	6월	청사 복도, 계단, 대기실 등 타일 교체 여직원 대기실 등 7개실 벽지 도배
본서 화장실 벽타일 교체	6월	화장실(1-3층) 6개소(각 층별 남·여 2개소)
서초·잠원 식당 환경개선	6월	기초 설계 및 공사업체 선정 공사기간 : 2018. 5. 8 – 5. 31
방배 내진 보수·보강	6월	설계용역(다음기술단 - 협의중) 설계기간 : 2018. 2. 26 – 2018. 4. 26 보수보강 공사 : 2018. 5. 1 – 2018. 5. 30

끝.