문서번호	설비부-2176
결재일자	2018.2.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
손영일		임병국	02/20 권오식
협조
	경리과장		代김용범

‘서울바이오허브 조성(2단계) 전기/통신공사-1차’

공사기간 연장 검토보고

2018. 02.

도시기반시설본부

설비부

‘서울바이오허브 조성(2단계) 전기/통신공사-1차’

공사기간 연장 검토보고

『서울바이오허브 조성(2단계) 전기/통신공사』와 관련, 건설사업 관리단으로부터 제출된 1차 준공기한 연기요청에 대하여 검토후 아래와 같이 보고드림.

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 서울바이오허브 조성(2단계) 전기/통신공사

❍ 공사규모 : 신관동(대수선) 지하1층/지상5층, 연면적 3,216㎡, 연구시설

별관동(증축)   지하2층/지상4층, 연면적 3,112㎡, 연구시설

❍ 공사기간 : 2017.09.28. ~ 2019.02.27.(총차)

2017.09.28. ~ 2018.02.28.(1차)

❍ 공사금액 : 전기 금2,474,972,760원(1차 250,000,000원)

통신 금540,191,540원(1차 50,000,000원)

❍ 시 공 사 : 전기-대영이엔티(ENT) 대표 이현정 외 2개사

통신-(주)세우엔지니어링 대표 박응성

❍ 건설사업관리단 : ㈜한국종합건축사사무소

2		감리단보고내용

❍ 검토근거 : ㈜한국종합건축사사무소 한종홍릉 제2018-466(2018.02.19.)호

- 전기/통신공사 1차공사 준공기한 연장요청 보고

❍ 보고내용

- 선행공종인 건축공사의 지연으로 변경된 건축공정표에 따라, 천정 배관 및      트레이공사는 천정,벽체가 완료된 이후 시공이 가능하고, 별관동 접지공사는     구조물 터파기 및 지열공사 배관이 시공되는 시점에 공사가 가능하므로,

- 품질확보 및 원활한 시공을 위하여 후속공종인 전기/통신공사(1차) 준공        기한을 건축공사 일정에 맞추어 2018.05.31.까지 연장.

3		공사기간연장내용

❍ 계약기간 조정(1차)

구 분	당 초	변 경	비 고
전기공사	2017.09.28. ～ 2018.02.28.	2017.09.28. ～ 2018.05.31.	증)92일
통신공사	2017.09.28. ～ 2018.02.28.	2017.09.28. ～ 2018.05.31.

※ 총차 계약기간 및 계약금액 변경 없음

❍ 연기사유 : 선행공종의 건축공사 공정에 맞추어 후속공종인 전기/통신공사의   준공기한 연장이 필요함.

❍ 공사기간 연장 귀책 기관 : 도시기반시설본부

❍ 지체상금 부과 여부 : 미부과

4		조치의견

❍ 건설사업관리단의 검토보고 내용이 적정하다고 판단되므로, 현장 여건에   맞게 공사기간을 연장하여 공정 관리에 차질이 없도록 조치하고자 함.

따로붙임 : 공기연장 관련 문서 1부.  끝.