	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	창신숭인 채석장 전망대 설계용역 계약변경 의뢰

1. 주거재생과-1998(2018.2.20.)호와 관련입니다.

2.「창신숭인 채석장 전망대 설계용역」에 대하여 아래와 같이 계약변경 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 창신숭인 채석장 전망대 설계용역

나. 용역기간 : 2017.11.1. ~ 2018.2.21

다. 계약금액 : 금19,600,000원

라. 계 약 자 : 조진만 건축사사무소

마. 계약변경 내용

구 분	당 초	변 경	비고
용 역 비	19,600천원	24,600천원	증 5,000천원
용역기간	‘17.11.01.~‘18.02.21.	‘17.11.01.~‘18.04.20.	약 2개월 연장

바. 변경사유 : 2018.1.19 용역 중간보고 결과, 채석장 전망대 부지를 포함한 인접 낙산배수지까지 과업범위를 확대·연계하여 전망대 기본구상(안) 제시토록 결정함에 따라 설계용역비 증가 및 기간 연장

붙임 : 1. 설계용역 변경계획 1부.

2. 합의각서, 설계내역서 및 과업내용서(변경) 각 1부.  끝.

	주거재생과장
주무관	문동일		주거재생계획팀장	김승훈		주거재생과장	02/20 국승열
협조자	계약2팀장	이태영
시행	주거재생과-2002	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가) 11층	/
전화	02-2133-7161	/전송	02-2133-0747	/	mdi2483@seoul.go.kr	/	부분공개(5)