	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	‘서울바이오허브 조성(2단계) 전기/통신공사-1차’공사기간 연장 의뢰

1. 설비부-2176(2018.02.20)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 ‘서울바이오허브 조성(2단계) 전기/통신공사-1차’ 와 관련,  공기연장 사항이 발생하여 아래와 같이 계약 변경을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공  사  명  : 서울바이오허브 조성(2단계) 전기/통신공사-1차

나. 계약변경 내용

1) 공기연장 내용(1차)

계약구분	계약업체	계약금액(원)	계약 기간		비 고
			당 초	변 경
전기공사	대영이엔티 외 2개사	250,000,000	2017.09.28. ~ 2018.02.28.	2017.09.28. ~ 2018.05.31.	계약금액 변경없음 공기 92일 연장
통신공사	㈜세우엔지니어링	50,000,000	2017.09.28. ~ 2018.02.28.	2017.09.28. ~ 2018.05.31.

2) 공기연장 사유 : 전기/통신분야 추진 공종(배관, 트레이설치 및 접지공사)이 선행공종인         건축공사의 벽체 및 구조물 터파기 시공시점에 공사가 가능하므로 건축공정에 맞추어           1차수 공사기간 연장이 필요함.

다. 예산과목 : 경제진흥본부 신성장산업과, 신성장산업 육성지원, 산업클러스터 조성 및           활성화, 홍릉 바이오의료앵커 조성 및 운영, 시설비

붙임 : 1. 공기연장 방침서 1부.

2. 공기연장 관련 문서(합의서 포함) 1부.  끝.

	설비부장
주무관	손영일		시책사업과장	임병국		설비부장	02/21 권오식
협조자
시행	설비부-2224	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8650	/전송	02-3708-8659	/	zerone@seoul.go.kr	/	부분공개(6)