문서번호	공공개발센터-1741
결재일자	2018.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	개발정책팀장	공공개발센터장
장승권	오승민	02/21 이상면

한강협력계획 4대 핵심사업(통합선착장, 피어데크, 여의테라스, 복합문화시설)

건설공사 기본계획 고시 추진계획(안) 보고

2018. 2.

도시재생본부

(공공개발센터)

한강협력계획 4대 핵심사업(통합선착장, 피어데크, 여의테라스, 복합문화시설)

건설공사 기본계획 고시 추진계획(안) 보고

중앙정부 - 서울시가 공동발표(`15.8.24)한「한강협력계획 4대 핵심사업」에 대한 건설기술진흥법에 의한 건설공사 기본계획 고시(안) 계획을 보고 드림

□ 사업개요

○ 사업목적 : 한강의 매력도, 편의성 높여 시민·관광객이 어우러진 공간 재창조

○ 위    치 : 여의도 한강공원 일대 (여의나루역 인근 수변부 및 제방상부)

○ 규    모 : 건축물 연면적 25,600㎡, 부유체·데크 면적 10,925㎡

○ 사업기간 : 통합선착장-`19년 完 / 피어데크 ·여의테라스 ·복합문화시설-`20년 完

○ 총사업비 : 1,896.4억원 (선착장 301.8, 피어데크 458, 여의테라스 574.4, 복합문화시설 562.2)

	《 주 요 내 용 》
✜ 통합선착장 : 관공선 등 통합기능 선착장 조성 [부유체 2,400㎡+상부구조물 2,100㎡] ✜ 피어데크 : 선착장과 연계한 수변집객시설 확보 [부유체 5,550㎡+상부건축물 7,000㎡] ✜ 여의테라스 : 윤중로변 수변상업가로 조성 [건축연면적 8,500㎡] ✜ 복합문화시설 : 한강변 시민문화 향유공간 제공 [건축연면적 8,000㎡]

□ 추진경위

○ 한강협력계획 정부-서울시 공동발표(22개사업, 3981억원)    : `15.08.24

○ 통합선착장, 피어데크 중앙투자심사 “조건부” 통과    : `16.02.26

○ 4대 핵심사업 기본계획(안) 대외발표                : `17.02.09

○ 통합선착장 공유재산심의·관리계획 의회 “적정” 의결    : `17.3.9 / 4.24

○ 통합선착장 국제설계공모 선정(당선작 : 청보글, 홍콩)      : `17.06.01

○ 여의테라스, 복합문화시설 중앙투자심사 “조건부” 통과 : `17.08.18

○ 피어데크·여의테라스·복합문화시설 공유재산심의 “적정”의결 : `17.09.26

○ 4대 핵심사업 기본계획수립용역 준공              : `17.12.08

□ 관련법령 : 건설기술진흥법 시행령 제69조(건설공사기본계획)

○ 발주청은 기본구상을 기초로 건설공사기본계획을 수립해야 함(제1항)

1. 공사의 목표 및 기본방향

2. 공사의 내용·기간, 시행자 및 공사수행계획

3. 공사비 및 재원조달계획

4. 개별 공사별 투자 우선순위

5. 연차별 공사시행계획

6. 시설물 유지관리계획

7. 환경보전계획

8. 기대효과와 그 밖에 발주청이 필요하다고 인정하는 사항

○ 발주청은 건설공사기본계획을 수립(변경)시 관계 행정기관의 장과 협의(제3항)

1. 공사의 목표 또는 기본방향의 변경

2. 1년 이상의 공사기간 연장

3. 10퍼센트 이상의 공사비 증가

○ 발주청은 건설공사기본계획을 수립하였을 경우 그 사실을 고시해야 함(제5항)

□ 조치의견

○ 관계기관 의견청취 등 관련절차를 완료하고 기본계획이 확정된 바,

○ 건설기술진흥법 시행령 제69조(건설공사기본계획) 규정에 의거 건설공사기본계획을 고시하여 안정적 사업추진 환경을 구축하고자 함

덧붙임 1) 고시문(안)

2) 건설기술진흥법 시행령 관련규정 발췌. 끝.