문서번호	설비부-2230
결재일자	2018.2.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
김현욱	여인웅	02/21 권오식

『탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설 전기공사』

실정보고사항 검토 보고

2018. 02.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설 전기공사』

실정보고사항 검토 보고

탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설 제2처리장 토목공사중 발생한 지장물(케이블) 이설에 대한 실정보고가 접수되어 검토 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

탄천하감-2018-46호(2018.02.09.), 제2처리장 지장물 이설 실정보고

Ⅱ		공사개요

공 사 명 :『탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설 전기공사』

공사위치 : 강남구 개포동 625 일원(탄천물재생센터 내)

공사기간 : (총차)2017.11.30. ~ 2020.01.29.

(1차)2017.11.30.~2018.08.31.

공사내용 : 수변전 설비 1식, 감시제어설비 1식, 계측제어설비 1식 등

도 급 비 : (총차) 1,928백만원, (1차) 780백만원

시 공 사 : ㈜부경일렉콤 외 2개사

감 리 사 : ㈜선진엔지니어링 외 2개사

Ⅲ		검토내용

실정보고 사유

❍ 제2처리장 사업부지 굴착구간 지장물(케이블) 발생

실정보고 내용
❍ 제2처리장 공사구간과 간섭되는 전력 케이블 이설

※ 제2처리장 지장물(케이블) 사용처가 방류동으로 확인되어                 ㈜탄천환경과 협의하여 정전후 이설 완료함(2018.02.19.)

공사부지 지장물(케이블)	공사부지 지장물(케이블)
[이설 전]	[이설 후]

주요 물량 내용

공 종	당 초	변 경	주요물량	비 고
지장물 이설공사	-	전력 케이블 철거 및 신설	전력 케이블(F-CV 150㎟)×692m
	-	맨홀 신설	맨홀 600×600×600 3개
	-	전선관 신설	전선관(ELP 100mm×110M)
	-	터파기	터파기 55M

개략 공사비 산출

공 종	단위	당 초	변 경	증·감	비 고
지장물 이설공사	원	14,662,743	43,449,048	증)28,786,305

감리단 검토의견

❍ 탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설 제2처리장 지장물 이설 실정보고는 적정하며 선행공정인 토목공정 진행이 불가함에 따라 전기선로 지장물을 긴급 이설하여야 함으로 제2처리장 주전기실 트레이 말단에서 방류동 구간

(173M)을 ㈜탄천환경 요구사항 수렴 고려하여 긴급 추가 교체함이 타당함.

Ⅳ		검토의견

건설사업관리기술자(전기)가 검토한 실정보고 내용이 적합한 것으로 판단되어 실정보고 사항을 승인하고 증·감되는 공사비는 설계변경시  반영하고자 함.

Ⅴ		향후계획

2020.01.: 공사준공

붙임  감리단 관련공문 및 검토의견서 1부.  끝.