문서번호	기전과-1476
결재일자	2018.2.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
하상철		송장현	02/21 김용제
협조
	주무관		박태진

2018년 도로기전시설물 일상유지보수(연간단가)

공사발주 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 2.

강서도로사업소

기전과

2018년 도로기전시설물 일상유지보수(연간단가)

공사발주 계획

우리사업소에서 관리하고 있는 도로기전시설물(교량, 고가차도, 입체교차로, 지하차도, 터널)의 일상 유지보수를 통한 안전사고 예방과 긴급상황 발생시 신속한 복구를 위하여 아래와 같이『도로기전시설물 일상유지보수(연간단가)공사』를 발주코자 함.

□ 추진근거

〇 2018년 기전과 업무추진계획[기전과-1012(2018.2.5.)]

〇 2018. 02. 05.  2018년 포장도로 및 기전분야 공통설계지침(동부도로사업소)

□ 도로기전시설물 현황

대상시설 (개소)	조명등 (등)	수배전반 (면)	비상발전기 (대)	배수펌프 (대)	재방송 (대)	CCTV (대)	비 고
계	14,885	110	14	61	8	147
한강교량(3)	3,724	-	-	-	-	-
일반교량(10)	1,015	-	-	-	-	-
고가차도(11)	1,055	-	-	-	-	-
입체교차로(5) 기타(2)	186	-	-	-	-	-
지하차도(20)	6,856	91	13	61	7	109
터 널(5)	2,049	19	1	-	1	38

□ 2018년 예산(재배정) 현황

(단위 : 천원)

사 업 명	2017년 예산	2018년 예산	증 ․ 감액	비 고
도로기전시설물 일상유지보수	258,000	270,000	12,000(증)

〇 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도시개발특별회계, 도로시설물일상유지보수, 시설비(401-01)

□ 발주계획

〇『2018년 포장도로 및 기전분야 공통설계지침』에 의거 설계시행 및

재무과에 계약 의뢰 예정.

〇 세부 추진계획

‑ 기전시설물 일상유지보수비(270,000천원)는 공사비와 자재비가 포함된

금액 으로 총 예산 중 240,000천원은 연간단가 공사로 발주 시행하고,

‑ 나머지 30,000천원 및 낙찰차액을 활용하여 기전시설물 유지관리에

필요한 자재비, 기타 연간단가에서 시행하기 곤란한 기전시설물 보수에 소요

되는 수리비용으로 사용하여 기전시설물 유지관리를 빈틈없이 하고자 함.

구 분	예산총액(천원)	지출계획	소요예산(천원)	비 고
시설비	270,000	기전시설 일상유지(연간단가)	240,000
		자재구입 및 긴급 보수	30,000	예산부족시 낙찰차액 활용

□ 발주방법

〇 공사명 : 도로기전시설물 일상유지보수 공사(연간단가)

〇 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

〇 입찰 참가자격 및 근거

‑ 전기공사업법 제4조 제1항에 의한 전기공사업 면허등록업체로서

주된 영업 소재지가 서울특별시에 소재한 업체

‑ 관련근거 : 지방계약법 시행령 제20조 제1항 제6호에 의하여 「전기공사업법」에                     따른 전기공사(추진가격 5억원 미만인 경우)

〇 공사기간 : 착공일로부터 ~ 2018년 12월 말일까지.

□ 추진일정

〇 2018. 02. 23       공사 발주 의뢰(재무과)

〇 2018. 03. 13       개찰

〇 2018. 03. 20       공사계약 및  착공

〇 2018. 12. 31       공사 준공

붙임 : 1. 2018년 기전과 업무 추진 계획 1부.

2. 기전시설물 현황자료 1부.

3. 설계 내역서 1부

4. 2018년 포장도로 및 기전분야 공통설계지침 1부. 끝.