기성부분검사(감독)조서

2017년 노면하부 동공탐사용역(3단계)

문서번호	도로관리과-2464
수 신 자	재무과장
접수번호

결재	주무관	도로관리팀장	도로관리과장
	최현	최연우	02/08 박문희

공사명	2017년 노면하부 동공탐사용역(3단계)
계약자	광성지엠㈜ 대표이사 한광수 외 1개사
계약금액	일금 육억칠천일백만원(금671,000,000원)				기성부분 준공금액		일금 이억삼천일백팔십칠만만원(금231,870,000원)
계약일자	2017 년 9 월 27 일				착공일자		2017 년 9 월 27 일
준공기한	2018 년 4 월 24 일				부분준공 일 자		2018 년 1 월 31 일
준공검사일자	2018 년 2 월 8 일				참고사항		선급금 지급 : 231,000,000원
건설산업지식정보시스템(Kiscon) 확인 사항				해당없음
위 공사(용역)에 대한 감독 및 기성준공검사를 마쳤는 바 공사 설계서와 도면 및 규격서(과업지시서) 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었기에 본 조서를 제출함.
2018 년 2 월 8 일
현장감독공무원		도로관리과	과	지방시설주사		직		성명	최 현
검 사 자		도로관리과	과	지방시설사무관		직		성명	최연우		최연우
검 사 자		도로관리과	과	지방시설주사보		직		성명	윤현주		윤현주
서울특별시(분임)재무관 귀하

기성부분 검사조서(제2회)

1. 용 역 명 : 2017년 노면하부 동공탐사용역(3단계)

2. 계 약 자 : 광성지엠㈜ 대표이사 한광수 외 1개사

3. 계약금액 : 一金육억칠천일백만원(금671,000,000원)

4. 기성금액   (※ 추진기간 : 2017.12.14. ~ 2018.1.31.)

○ 전회까지기성  : 금 370,000,000원 (55%)

○ 금회기성(2회): 금 231,870,000원 (35%)

○ 누계기성      : 금 601,870,000원 (잔액 69,130,000원)

5. 세부내역

(단위 : 원)

공 종	규 격	단위	계 약 금 액		전회까지 기성금액		금회 기성금액		잔여금액
			수량	금 액	수량	금 액	수량	금 액
1. 2016년 노면하부 동공탐사용역(2단계)
1) 직접인건비
1차탐사	차량형 GPR	km	1,150	16,027,150	283	9,754,160	182	6,272,990	0
1차탐사 GPR자료분석	해석 및 자료처리	km	1,150	192,055,690	283	116,885,500	182	75,170,190	0
보고서작성		km	1,150	8,463,000	186	3,385,200			5,077,800
2) 직접경비
성과품인쇄, data백업		식	1	1,291,125	-	0	-	0	1,291,125
3) 제 경 비	직접인건비의110%	식	1	228,913,124	1	137,375,073	1	85,952,471	5,585,580
4) 기 술 료	(직접인건비+제경비)×20%	식	1	87,403,193	1	52,452,301	1	32,818,216	2,132,676
5) 2차 조사비	천공 및 내시경조사	공	380	27,114,858	150	16,533,450	96	10,581,408	0
6) 동공내부 흙의 유실속도 실험		식	1	30,000,000	-	0	-	0	30,000,000
7) 유전율과 노면온도, 함수비와 상관성연구		식	1	10,000,000	-	0	-	0	10,000,000
8) 동공성장 모니터링실험		식	1	10,000,000		0		0	10,000,000
9) 굴착복구 구간 시험탐사		식	1	3,000,000		0		0	3,000,000
공급가액				610,000,000		336,363,636		210,790,909	62,845,455
9) 부가가치세				61,000,000		33,636,364		21,079,091	6,284,545
합 계				671,000,000		370,000,000		231,870,000	69,130,000

붙임 1. 기성부분준공(제2회) 신고서 1부.

2. 성과품사진, 참여기술자 급여지급 증빙자료, 국세․지방세 완납증명서 등 각 1부. 끝.

	도로관리과장