투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	설계변경(정산) 시행 및 변경계약 의뢰(청계천 생태환경 개선공사 2단계)

우리부에서 시행중인『청계천 생태환경 개선공사(2단계)』의 설계변경(정산) 시행에 따른 변경계약을 다음과 같이 의뢰하니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 청계천 생태환경 개선공사(2단계)

2. 도 급 자 : 충정종합건설주식회사 대표자 김성복

3. 설계변경내역(도급비)

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감
총차 (3차분 포함)	1,842,520,000	1,347,386,000	감)495,134,000
3차분	118,180,000	208,296,000	증) 90,116,000

- 변경사유 : 3차분 시공물량 정산 및 준공기한(2018.2.25.) 도래

4. 공사기간 : 변경없음

5. 예산과목 : 치수및하천관리, 하천복원 및 정비, 청계천개선보완사업, 시설비

및 부대비, 시설비

붙  임  1. 정산 설계변경 검토보고서 1부.

2. 감독기관(공단 3처) 관련문서 1부.

3. 감독기관(공단 2처) 설계변경 검토보고서 1부.

4. 설계변경내역서(3차 정산) 1부.

5. 설계변경관련 보고서 1부.

6. 시공사 관련문서 1부.

7. 합의 각서 1부.  끝

							방재시설부장
주무관							고광호			치수시설과장					조성만					방재시설부장					02/21 이임섭
협조자
시행			방재시설부-2152									(						)		접수											(						)
우	04524					중구 청계천로8(무교동 96번지)프리미어플레이스 빌딩 14층															/
전화		02-3708-8772						/전송			02-3708-8756					/													/	부분공개(5)