문서번호	기전설비과-1545
결재일자	2018.2.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전설비과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
이상록	조성태	유성종		02/22 구아미
협 조
	시설안전부장		代유승효
	기획예산과장		김형규
	재무회계과장		박병식
	시설과장		송병욱

아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다

우면산가압장 급수체계 개선 공사

(우면산가압장)

2018년 기계분야 관급자재 구매 계획 보고

2018. 2.

상수도사업본부

【 생산부】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	우면산가압장 급수체계개선 기본및실시설계용역
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

우면산가압장 급수체계 개선 공사

2018년 기계분야 관급자재 구매 계획 보고

우리 본부에서 시행중인「우면산 가압장 급수체계 개선 공사」에 소요되는 관급자재(밸브 및 크레인)의 2018년 구매 계획을 보고 드림.

Ⅰ		기계분야 사업 개요

◯ 사 업 명 : 우면산가압장 급수체계 개선공사(기계분야)

◯ 사업기간 : 2017.12.13. ~ 2020.05.30.

◯ 사업내용 : 우면산가압장 가압펌프 5대 및 수충격설비 1대 신설,

암사 저양정계통 송수펌프 7대 교체

◯ 기계분야 공사비 : 3,858백만원 (총 공사비 : 12,351백만원)

- 기계분야 배관공사 :   813백만원(계약완료)

- 기계분야 관급자재 : 3,045백만원

◯ 구매대상(기계분야 관급자재)

구매년도	품 명	대수	금액(백만원)	비고
2018	크레인	1	45	우면산가압장 유지관리용
	밸브류	2	85	양재배수지 유출밸브
2019	밸브류	33	368	가압 및 송수배관용
	가압펌프	5	576	우면산가압장
	송수펌프	7	1,649	암사 저양정 계통
	수충격설비	1	322	우면산가압장 관로 보호용
계			3,045

※ 토목 및 건축공사 일정에 따라 변경가능

Ⅱ		2018년 사업계획

□ 2018년 분야별 추진계획

월별 공종별	3	4	5	6	~	9	10	11	12
밸브 구매·설치 (기계)
	밸브구매		설치
매립배관공사 (토목)
			흡수정 유출배관 매설공사
건축 공사 (건축)
				우면산가압장 구조물 공사
크레인 구매·설치 (기계)
					계약	제작		현장 설치

※ 토목 및 건축공사 일정에 따라 변경가능

□ 분야별 추진순서도

3

2

4

1

※흡수정 유입배관(붉은색)은 2019년 시행예정

Ⅲ		세부추진계획

□ 우면산가압장 흡수정(구 양재배수지) 유출밸브 구매

◯ 구매대상 : 전동식 버터플라이밸브 1,500A × 2대(2상식)

◯ 소요예산 : 약85백만원

◯ 예산과목 : 자본적지출, 비가동설비자산취득, 우면산가압장급수체계개선

시설비및부대비, 시설비

◯ 구매방법 : **********

□ 우면산가압장 설비 유지보수용 크레인 제작구매설치

◯ 구매대상 : 천장크레인

◯ 소요예산 : 약45백만원

◯ 예산과목 : 자본적지출, 비가동설비자산취득, 우면산가압장급수체계개선

시설비및부대비, 시설비

◯ 구매방법 : *************

◯ 납품범위

- 천장크레인 제작설치 (인양하중 5톤 × span 6.4m이상 × L30.5m)

- 시험운전·검사 및 안전인증 허가 포함.

끝.