문서번호	연구지원부-2277
결재일자	2018.2.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		시설관리팀장		연구지원부장
박영만		성정웅		02/22 代최동철
협 조

어린이집 보육환경 개선 계획

2018. 2.

보건환경연구원

(연구지원부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

어린이집 보육환경 개선 계획

우리연구원 어린이집의 낡은 벽지 및 바닥제 교체 등 실내환경 개선과 놀이터 보수(데크) 등 시설물을 재정비하여 안전하고 쾌적한 보육환경을 조성하고자 함

□ 추진배경

○ 낡은 벽지 및 바닥제 교체를 통한 쾌적한 공간형성과 안전한 실내

환경조성

○ 놀이터(목재데크)보수, 외벽(유리)단열시공 등 시설물 재정비를 시행   하여 양질의 보육환경 제공

□ 어린이집 현황

건축구조	건축면적	준공일자	보육인원	보육교사
철근콘크리트조 (커튼월)	354.11㎡	2011.6.10	45명	10명

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2017. 12. 5.

○ 점검내용 : 어린이집 보육환경 점검

○ 점 검 자 : 시설관리팀장 외 1명

□ 점검결과 및 개선(안)

구 분	점 검 결 과	개 선(안)
바닥마감제	마감제 훼손, 목재재질로 넘어질 경우 안전사고 우려	놀이공간 바닥을 아동의 안전을 고려한 쿠션타입의 마감재 교체
벽, 천정 도배	장기간 사용으로 도배 오염 심각	친환경 벽지 도배(방염소재 : 소방법적용)
외벽(유리)	커튼웰방식의 유리벽체로 에너지 효율 저하	발포폴리스틸렌(스티로품) 단열제 시공
	장기간 사용으로 방부.방수기능 저하	오일스테인 재도장
놀이터보수 (데크 도장)

○ 현장사진

바닥마감재 훼손	벽, 천정 도배 오염.

외벽(유리) 에너지 효율 저하	놀이터(목재 데크) 방수기능 저하

□ 세부 추진계획

○ 공사개요

- 공 사 명 : 어린이집 환경개선 공사

- 공사위치 : 보건환경연구원 어린이집

- 공사기간 : 계약일로부터 30일이내

○ 공사내용

- 놀이공간 바닥제 개선 : 큐션타입 비닐시트(t=4.5mm)

- 벽, 천정 벽지 도배 : 실크형벽지(방염)

- 외벽(유리)단열 : 발포폴리스티렌 단열재(t=50mm)

- 놀이터 보수(데크 도장) : 바탕처리+오일스테인 (2회칠)

○ 소요예산 : 18,000천원

- 놀이공간 바닥제 개선 : 11,000천원

- 벽, 천정 벽지 도배  : 5,800천원

- 외벽(유리)단열 : 700천원

- 놀이터 보수(데크 도장) : 500천원

○ 예산과목 : 연구 및 전문훈련 강화, 청사시설 유지관리, 공공운영비.

○ 계약방법 : (소액)수의계약

○ 추진일정

- 공사발주 : ‘18. 2월

- 공사시행 및 준공 : ‘18. 2월~3월.  끝.