	남부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	준공기한변경(노들로 방음벽 설치공사)

우리사업소에서 시행중인 『노들로 방음벽 설치공사』에 대하여 아래와 같이 준공기한변경을 시행하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가.  용 역 명 : 노들로 방음벽 설치공사

나. 용역기간

- 당초 : 2017. 10. 12. ~ 2018. 2. 28.

- 변경 : 2017. 10. 12. ~ 2018. 3. 21.

다. 계 약 자 : *******************

라. 변경사유 : 추가 작업지시에 따른 공기부족

붙  임 : 1. 설계변경(1회)내역서 1부.

2. 검토보고서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝

	도로보수과장
★주무관	조재민		도로보수과장	02/26 김준섭
협조자	주무관	한수영
시행	도로보수과-928	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145 1층 도로보수과 (대림동)	/	www.seoul.go.kr
전화	3284-5451	/전송	836-1634	/		/	부분공개(5)