	강서도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(도로관리과장)
(경유)
제목	항동지구 내 군 전용선 사용 중지 기간 연장 협의 완료 알림

서울주택도시공사 택지조성부-892호(2018. 2.21.) 의 「항동지구 내 군 전용선 사용 중지 기간 연장 협의」와 관련, 아래와 같이 협의완료 하였음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 군 전용선(항리3 철도건널목) 운행 중지 기간 변경

1) 당초: 2016. 9. 1~2018. 3.15.

2) 변경: 2016. 9. 1~2018. 5.31.

나. 기간 변경 사유

1) 철도 운행 재개 대비 현장 합동점검 시 지적사항에 대한 추가 공사 필요

2) 철도궤도공사 지연에 따른 후속 철도건널목 안전설비(신호)공사 순연.

붙임  1. 공문서 1부.

2. 예정공정표 1부. 끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	정경성		기전과장	전결 02/26 송장현
협조자
시행	기전과-1602	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 (마곡동)	/
전화	02-2657-7969	/전송	02-2657-7939	/	jks00@seoul.go.kr	/	대시민공개