문서번호	시설보수과-908
결재일자	2018.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
최승룡		윤승범	02/26 이성재
협조	관리과장		윤문경
	운영과장		최영효

『제1처리장 시설현대화사업』

슬러지처리비 및 전기요금 부과계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.02.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『제1처리장 시설현대화사업』

슬러지처리비 및 전기요금 부과계획

우리센터에 시행중인 『제1처리장 시설현대화사업』의 종합시운전 중단에 따른 준공기한 연기로 당초 준공기간 이후에 사용된 슬러지처리비와 전기요금 부과에 대한 보고임

1		사업개요

□ 사업규모 : 시설현대화 25만톤/일

□ 사업기간 : ‘09.02.13~’17.04.28

□ 총사업비 : 3,473억원

□ 시 공 사 : GS건설(주)외 3개사(감리 : ㈜한국종합기술외 1)

2		추진경위

□ ‘17.02.20 : 종합시운전중단

□ ‘17.03.08 : 준공기간 연기(’17.04.28 → ‘18,02,28)

□ ‘17.03.27 : 부시장보고(개선대책)

□ ‘17.04.27 : 1차 처리시설 여재교체 완료

□ ‘17.09.05 : 하수도과학관 및 물 순환 테마파크 개관

□ ‘18.02.현재 : 전체부하 시 운전중

3		부과현황

□ 부과금액 : 2,988,518,260원(슬러지 처리비 630,628,000원, 전기요금 2,357,890,260원)

□ 부과기간 : ‘17.04.29~’18.01.31

4		부과의견

□ 도시기반시설본부에서 받은 법률자문 의견은 성능보증 이전 하수처리비용은      시공사와 서울시간 협의하여 결정토록 하고 있으나,

□ 종합시운전시 여재폐색 및 노즐막힘에 따라 방류수질 기준 초과예상에 따른      시공사 귀책사유로 시운전이 중단(‘17.02.20)된바, 하수처리비용(슬러지처리비      및 전기요금)은 시공사가 부담하는 것이 맞다고 판단됨

5		향후계획

□ ‘18.02.26 : 하수처리비 부과예고

□ ‘18.03.05 : 고지서발급

붙임 : 1. 슬러지처리비 산출내역 1부.

2. 전기요금 산출내역 1부.    끝.