문서번호	물재생시설과-2863
결재일자	2018.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	물재생운영팀장	물재생시설과장	물순환안전국장
김병오	정훈모	이인근	02/26 한제현

2018년 차집시설 정비방안 추진계획 보고

2018. 2

물순환안전국

(물재생시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2018년 차집시설 정비방안 추진계획 보고

2018년 차집시설 개선 관련으로 확보된 시설비(시비, 각 센터) 사업에 대한 정비방안 추진계획을 보고드림

1		‘18년도 차집시설 대상사업 현황

【차집관로 성능개선】

❍ 위    치 : 개봉유수지 등

❍ 규    모

- 개봉유수지 횡단 차집관로 신설

․ D800~1,500㎜(L=198.4m), □1.5×1.5m(L=182.7m)

※ 차집관로 성능개선 시행 실적(‘14~’17) : 17.464Km (붙임 참조)

- 우수토실 정비, 내부조사 등

❍ 사업내용 : 개봉유수지 악취 저감, 차집관로 시설물 정비 등

❍ 사 업 비 : 2,630백만 원(개봉유수지 1,650백만 원)

❍ 사업기간 : 2018.01 ~ 12

【차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 용역】

❍ 과업위치 : 4개 물재생센터

❍ 과업내용 : ‘10.5~’13.8 조사용역 결과, 통수능 부족(1.5Q미만) 대상 중 미설계 구간 11.2Km 등

❍ 도 급 액 : 1,465백만 원(연차 사업, ‘18년 예산 365백만 원)

❍ 과업기간 : 2016.4 ~ 2018.3

【차집관로 내부 점검 및 정비】

❍ 규    모 : 내부 점검 및 보수 L=194Km

❍ 사업내용 : 노후 차집관로 점검 및 보수 등

❍ 사 업 비 : 14,080백만 원

- 센터별(백만 원) : 중랑 5,600, 난지 4,480, 탄천 1,000, 서남 3,000

❍ 사업기간 : 2018.02 ~ 12

❍ 사업방안

- 점검대상 : 4개 물재생센터 차집관로 194Km 중 73Km

- 정비대상 : 13.5Km(중랑 2.5, 난지 6.8, 탄천 2, 서남 2.2)

※ 비굴착 정비 현황(‘14~’17) : 15,256m (‘18년 13,155m 정비 예정)

- 센터별(m) : 중랑 7,797, 난지 4,499, 탄천 642, 서남 2,318

<  2017년 차집관로 내부 물막이 및 물돌리기 점검결과 >

○ 조사개요 : 탄천 및 서남처리구역

- 위치 : 성내천, 안양천 우안

- 규모 : □2.8×2.2m ~ □2.0×2.0m, L=1,549m

- 방법 : 물막이 및 물돌리기 후 내부 육안점검

○ 선정사유 : 노후시설 및 및 현장여건 감안

○ 점검결과

- 시설물 상태평가결과 보수 및 보강이 필요한 “보통” 상태로써 비교적 양호한 시설물로 평가되었음

○ 문 제 점

-	차집관로(박스) 물막이 및 물돌리기 시행에 많은 비용이 소요되나 점검결과 구조적 결함이 확인되지 않음

- 향후 미 점검구간에 대해 동일방법으로 점검 시 예산낭비 우려가 있음

‣ 조사방법 및 평균단가

조사방법	평균단가	비 고
물막이 및 물돌리기	488,050 ~ 460,140원/m	서남, 탄천물재생센터
SONER	6,130원/m	난지물재생센터
CCTV	1,850원/m	난지물재생센터

※ m당 단가는 2017년 정산액 기준으로 산정된 금액임

○ 조치계획

- 관로점검은 cctv, soner 장비 등을 활용하여 우선 시행 후 이상유무에 대한 정밀조사가 필요한 구간에 대해 물막이 및 물돌리기를 시행하여 점검 시행

2		추진경위

❍ ‘10.5 ~ ’13.8(2회) : 차집시설 현황 및 성능조사 용역 시행

- 통수능 부족 : 70.2Km(총 468Km의 15%)

․ 1.5Q 미만 23.3Km(5%), 1.5~3.0Q 46.9Km(10%)

❍ ‘14 ~ ’17 : 차집관로 성능개선 사업 시행

- 차집관로 통수능 부족 1.5Q 미만 및 연접관로 17.6Km 시행(붙임)

❍ ‘16.4 : 차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 착수

❍ ‘18.1 : 차집시설 점검방향 및 보수 등 관련 회의 개최

- ‘18년 사업관련 관로 내부조사 대상 및 방법, 공사 발주 시 투명성 제고 방안 관련

3		추진방향

【차집관로 신설 및 통수능 확보】

❍ 시설물 유지관리 등 업무 효율성 고려 점검 및 설계, 공사 시행

- 구로구(치수과) 시행 : 개봉유수지 횡단 차집관로 설치공사(신설)

- 물재생시설과 시행 : 차집관로 성능개선 기본 및 실시설계(연차 사업)

	< 차집관로 성능개선 예산 집행계획 >
○ 예 산 액 : 980백만 원(시비) ○ 예산과목 : 시설비(차집관로 성능개선), 민간대행사업비(차집관로 성능개선) ○ 집행계획 - 개봉유수지 내 도수로 악취저감을 위한 차집관로 설치【 구로구 】 ‣ D800㎜(L=38m), 사업비 130백만 원 - 도봉천 외 6개 하천 차집관로 조사【 중랑물재생센터 】 ‣ D300㎜~1,350㎜(L=38㎞), 사업비 160백만 원 - 홍제천 우수토실 정비【 난지물재생센터 】 ‣ 우수토실 가림막 설치(20개소), 사업비 200백만 원 - 탄천수계 차집관거 사각박스 전구간 점검【 탄천물재생센터 】 ‣ 한강본류 : □1.5×1.5m ~ 2□3.0×3.0m(L=25㎞), 양재천 : D800㎜~1,500㎜(L=3.5㎞), 사업비 290백만 원 - 차집관거 내부조사【 서남물재생센터 】 ‣ 한강본류 역사이펀 및 상․하류(L=10㎞), 안양천 좌우안(L=10㎞), 사업비 200백만 원

【노후 차집관로 내부 점검 및 정비】

❍ 추진방안

- 관로 내부 사전 철저 조사 후 필요성 여부 검토 시행

❍ 정비대상 : 박스관 등 내부 조사 후 구조물 안전 및 연결부 누수 등 필요구간

※ 차집관로 총연장 468Km(원형관 201, 박스관 195, U형관 72)

- 조사 완료 : 202Km(정비완료 21, 정비예정 17, 관찰필요 164)

- 조사 대상 : 194Km(오수량이 많아 육안조사 불가 구간)

계(Km)			원형관(Km)			박스관(Km)			U형관
총연장	조사완료	조사대상	총연장	조사완료	조사대상	총연장	조사완료	조사대상	상시점검 및 보수
396	202	194	201	73	128	195	129	66

※ U형관 차집관로 72Km는 상시 점검 및 보수시행

❍ 조사방법

- 센터별 박스관 등 내부 전수 조사 후 연차별 정비계획 수립

․조사 시 육안 및 CCTV, 물돌리기 후 내부 점검 및 보수

․유량 과다구간 점검 가능한 장비(SONER 초음파 장비 등) 적극 도입

❍ 정비방법

- 관로 내부 조사(73km) 및 일부 구간 정비(13.5km) : ‘18년

- 관로 내부조사 잔여구간(121km) 조사 후 연차별 정비 : ‘19~20년

【우수토실 및 수문 정비】

❍ 정비대상 : 용량부족, 노후, 과차집, 토사 퇴적 등 기능 및 안전미흡

- 우수토실 현황 : 총1,141개소(중랑 569, 난지 254, 탄천 115, 서남 203)

※ 우수토실 유량조절장치 등 시설 개선 : 하천수 역류, 과다 차집, 토사 퇴적 등

※ 우수토실(유량조절장치) 정비 실적(난지 및 서남 물재생센터)

- 물량 및 사업비 : 22개소 568백만 원

- 사업기간 : 2014.1~2017.12

- 수문 현황 : 총136개소(중랑 26, 난지 52, 탄천 22, 서남 36)

※ 수문 정비대상은 “차집관로 수문 성능개선 기본 및 실시설계(2015.2)” 참조

❍ 우선순위 : 한강 역류 구간 등 대형 우수토실, 실효성, 노후도 등

❍ 사 업 비 : 차집관로 예산, 집행잔액 등 가용예산 최대한 활용 시행

4		향후계획

❍ 2018. 2 : 방침 통보(서울시)

❍ 2018. 3 : 차집관로 내부조사 및 정비계획 수립(각 센터)

❍ 2018. 3 : 업무 협의, 설계도서 심사, 예산 재배정 및 사업 발주

❍ 2018. 3 ~ 12 : 사업 시행

❍ 2018. 12 : 사업 완료

붙임 : 가. ‘18년 차집시설 관련 사업비(시+센터) 현황 1부.

나. 차집관로 성능개선사업 추진실적(‘14~’17년) 1부. 끝