문서번호	도시철도계획부-1645
결재일자	2018.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시철도설계과장	도시철도계획부장
최원혁		이명수	02/26 김진팔
협조

지하철 환기구 지면형 설치방안 마련 용역

준공기한 연기 검토 보고

2018. 2.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

지하철 환기구 지면형 설치방안 마련 용역

준공기한 연기 검토 보고

「지하철 환기구 지면형 설치방안 마련 용역」중간보고회시 외부 전문가 자문 실시 의견에 따른 준공기한 연기 검토 보고임

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 지하철 환기구 지면형 설치방안 마련

○ 용역기간 : 2017.3.16 ~ 2018.2.28

○ 용 역 비 : 149,446천원

○ 용 역 사 : 동부엔지니어링㈜ 대표 노재화

□ 추진현황

○ ’17.03.16. : 용역계약 및 착수

○ ’17.04.20. : 착수보고회 개최

○ ’17.05.23./08.31 : 용역 공정보고회

○ ’17.12.06. : 용역 중간보고회

○ ’18.02.26. : 용역 자문회의

□ 준공기한 연기

○ 연기사유

- 용역 자문의견 반영 및 보고서 보완 등을 위하여 준공기한 연기 필요

○ 준공기한 연기

구분	당초	변경	비고
용역기간	2017.03.16. ~ 2018.02.28.	2017.03.16. ~ 2018.04.30.	61일 연기

※ 계약금액 변동 없음

○ 연기 귀책소재 : 계약자 귀착사유 없음(지체상금 미부과)

□ 조치계획

○ 상기 내용과 같이 용역 준공기한 연기 시행코자 함.  끝.